문서번호	시설과-10702
결재일자	2018.11.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
차승현		송병욱	11/15 이규상
협 조
	주무관			최이영
	주무관			윤걸
	주무관			문정주
	주무관			김기봉

『국사봉배수지건설공사』

계약금액조정 심사 소위원회 결과보고

2018. 11.

상수도사업본부

(시 설 과)

『국사봉배수지건설공사』

계약금액조정 심사 소위원회 결과보고

국사봉배수지건설공사 관련 송수관로 구간 폐기물 처리 및 노선변경외 1건에 대하여 계약금액조정 심사 소위원회를 개최하고 결과를 보고 드림.

1
		공사개요

○ 공 사 명 : 국사봉배수지 건설공사

○ 공사개요 : 배 수 지 12,000㎥

송배수관 200~1000㎜, 연장 3.4㎞

○ 도 급 비 : 8,873백만원( 3차 : 4,445백만원)

○ 공사기간 : 2016. 12. 1.~2019. 5. 19.

○ 시 공 사 : 청광종합건설㈜ 대표 허 숭

○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트외 2개사 대표 이우정

2
		소위원회 개최

○ 일    시 : 2018. 11. 14.(수)

○ 심의안건 : 송수관로 구간 폐기물 처리 및 노선변경외 1건

- 공사(용역)비 증,감 현황 :**************

○ 검 토 자 : 시설과장 등 4명

3
		계약금액 조정 근거

○ 지방자치단체 공사계약일반조건 제6절 공사 설계의 변경 1.설계변경 가. 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다.

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

2) 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

4
		계약금액 조정 내용

○ 건설폐기물 신규발생 및 관악로 송수관(D700mm)부설 구간 노선 변경 검토

- 공사(용역)비 증․감 내용

․시설공사 도급비

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감
****	***********	************	*************

․폐기물처리용역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감
***	**	***********	*************

- 세부 검토내용 : 적정

․ 관악로 송수관로 부설구간의 생활쓰레기, 건축잔재 등 신규 발생된 건설폐기물처리와 송수관 부설구간인 관악로의 당초 설계된 3차로에서 도로확장전 미철거된 건축물의 간섭과 매립된 생활폐기물 등의 발생량을 최소화하기 위해 공사 진행구간을 2차로로 변경 조치함이 타당하며,

․ 건설사업관리기술자의 검토내용과 같이 산출된 공종별 수량 및 공사비 변경분에 대하여는 설계변경시 반영함이 적정함.

○ 가시설 계측관리 기간 연장

- 공사비 증․감 내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감
****	***********	***********	************

- 세부 검토내용 : 적정

․ 가시설 철거시기를 고려한 계측기간 변경 조치함이 타당하며,

․ 건설사업관리기술자의 검토내용과 같이 산출된 공종별 수량 및 공사비 변경분에 대하여는 설계변경시 반영함이 적정함.

5
		조 치 의 견

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 공사계약일반조건 제6절 공사설계의 변경 1.설계변경, 제7절 계약금액의 조정 1. 설계변경으로 인한 계약금액 조정에 의거 설계변경 및 변경계약코자 함.

2018년 11월 14일

위 검토자 : 건설공사 계약금액조정 소위원회

팀  장  :   시설과장                    송 병 욱

팀  원  :   시  설  과  지 방 시 설 주 사    윤    걸

시  설  과   지방시설주사보    문 정 주

시  설  과   지방시설주사보    김 기 봉

붙임 : 실정보고 관련서류 각 1부.  끝.