문서번호	자원순환과-19137
결재일자	2018.11.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

					시 민
주무관	새활용플라자팀장	자원순환과장	대기기획관		기후환경본부장
박지현	안은란	박동규	이해우		11/16 황보연
협 조

서울새활용플라자 전기버스 충전기 용량 변경 계획

2018. 11

기후환경본부

(자원순환과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

새활용플라자 전기버스 충전기 용량 변경 계획

서울새활용플라자에 도입예정인 전기버스 배터리가 256kW로서 안정적인 버스 운행을 위해서 충전기 용량을 150kW에서 200kW로

변경·확대 설치하고자 함.

□ 추진개요

○ 사업목적 : 새활용플라자를 이용하는 단체에 교통편의를 제공하고 기존 대형버스 운행으로 인한 미세먼지 배출을 줄이기 위하여 전기버스를 도입하여 활용하고자 함.

○ 전기버스 구매 사양

- 품      명 : 현대 일렉시티 전기버스

- 승차인원 및 배터리 용량 : 30인승, 256kW

- 계  약  일 : 2018.6.4.

- 납품예정일 : 2018.12.1.

□ 전기충전기 제작 및 설치 계약 현황

구 분	충전기 제작	전기공사
사업개요	*****	********** ***************
계약기간	************************	*********************
계약금액	***************	****************
계약업체	*******	*******

□ 전기충전기 용량 변경사유 및 변경내역

○ 변경사유

- 새활용플라자에 도입예정인 현대 일렉시티 전기버스는 배터리 용량이 256kW로서 타 차종보다 큼

□ 전기버스 보급대상 차종 : 붙임 참조

- 통상 전기버스 배터리 용량(97〜204kW)에 맞춰 150kW 충전기로 설치하고자 하였으나, 낙찰된 현대 전기버스의 배터리 용량이 256kW로서  타 기종보다 커, 전기버스의 안정적인 운행을 위해서는 200kW 충전기로 확대가 필요함

□ 충전시간 비교 : 200kW 충전기(90분 소요), 150kW 충전기(120분 소요)

- 따라서 급속충전 및 버스 배터리의 안정적인 운영을 위해 200kW 충전기로 용량 확대하여 설치하고자 함

○ 변경내역

- 전기충전기 제작

구 분	기 존	변 경	변경내역
용 량	*****	*****	*******
금 액	********	********	**
납품일	************	************	******

- 전기공사

구 분	기 존	변 경	변경내역
공사내역	********** ***************	********** ***************	************ *************
금 액	********	********	***********
납품일	***********	************	******

□ 전기충전기 캐노피 설치 : 누수 방지를 위해 캐노피 설치가 필요하며, 새활용플라자 민간위탁금으로 별도 추진

□ 소요예산

○ 전기충전기 제작 및 전기공사비 : 총 99,974천원

※ 예산 : 100,000천원(기후대기과 재배정)

○ 예산과목 : 기후대기과, 기후변화 총괄 대응, 친환경차량 보급, 그린카 충전인프라 구축, 시설비

□ 향후 추진일정

○ 충전기 계약변경 : 2018. 11. 16

○ 전기공사 설계변경 : 2018. 11. 20

○ 전기버스 납품 전 검수 : 2018. 11. 26

○ 전기버스 납품 : 2018. 12. 1

○ 충전기 설치 및 전기공사 완료 : 2018.12.14.

붙임 : 전기버스 보급차종 현황 1부. 끝.