문서번호	도시철도토목부-13506
결재일자	2018.11.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
노권호		윤방식	11/16 代윤방식
협조
	주무관		엄상민

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사』

보도복구 변경에 따른 실정보고에 대한 검토보고

2018. 11.

도시철도토목부

「서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사」

보도복구 변경에 따른 실정보고에 대한 검토보고

「서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사」와 관련 보도복구 변경에   따른 실정보고에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		사업개요

❍ 공 사 명: 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

❍ 위    치: 서울시 송파구 석촌역~올림픽공원 남4문사거리

❍ 규    모: 총연장 1,390.5m(정거장 1개소, 본선환기구 4개소)

❍ 공사기간: 2009.12.31. ~ 2018.12.31.

❍ 도 급 비: **********

❍ 시 공 사: 롯데건설(주)외 1개사

❍ 감 리 사: 벽산엔지니어링(주)외 3개사

Ⅱ		추진경위

❍ ‘17.07.20. : 도로시설물(보도) 원상복구 계획에 따른 변경 및   추가정비 요청 (송파구 ⇨ 본부)

❍ ‘18.04.10. : 보도복구 관련 송파구 도로과 회의개최

❍ ‘18.07.16. : 보도환경개선과 보도설계 협의(1차)

❍ ‘18.07.30. : 보도환경개선과 보도설계 협의(2차)

Ⅲ		보고내용

□ 보도복구 변경

❍ 위 치

❍ 주요 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
보도블록	****** *****	***** *************	*** **
자전거 도로	***	***********
보차도 경계석	************* ***********	****************** ************ ************
볼 라 드	**** ****	**** ****	****** ******
측 구	*********	*********

❍ 수량 증감 내용

구 분	단위	당 초	변 경	증 감
보도블록설치	a	*****	*****	******
시각장애인용 점자블록	㎡	***	***	*****
보차도경계석설치 (200 x 300 x 1,000)	m	***	*	*****
보차도경계석설치 (200 x 250 x 1,000)	m	*	*****	*******
도로경계석설치	m	*****	*****	****
자전거도로설치	㎡	*****	***	*****
MMA도막포장	㎡	**	***	*****

❍ 보도복구 변경현황

- 934정거장(방이사거리) 구간

- 종점(올림픽공원 남4문사거리) 구간

- 시공 상세도

보차도 경계석 및 측구	차량진출입로

- 시공 상세도

자전거도로	보도블록
볼라드(송파구 지정)	불투수 블록

□ 공사비 증감 내용                                    (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
보도복구	*********	*******	*********
제 경 비	*******	*********	**********
계	********	*********	***********

□ 관련규정

❍ 입찰안내서 제3장 계약조건 (공사계약일반조건 제20조 제2항)

제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

② 발주기관이 설계변경을 요구한 경우(계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우를 포함한다. 이하 같다)에는 제1항의 규정에 불구하고 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액의 범위안에서 발주기관과 계약상대자가 ******************************************************* 하여 결정한다. 다만, 계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다.

❍ 입찰안내서 제3장 계약조건 (지하철9호선 3단계 일괄공사특수계약조건) 제19조 제2항

제19조(설계변경 등)

② 계약금액의 조정이 가능한 설계변경은 발주기관에 책임 있는 사유 또는 천재․지변 등 불가항력의 사유로 인한 경우에 한하며, 일반조건 제21조제3항의 각호를 다음과 같이 구체적으로 규정한다.

2. 발주기관외 당해공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어 이를 발주

기관이 수용하는 경우는 다음과 같다.

가. 서울특별시(도시기반시설본부, 구청 및 사업소를 포함한다)에서 유지

관리하는 도로 부속 시설물중 지하철공사와 관련이 없는(상수도, 하     수도, 가로수 및 수목, 포장, 신호 시스템 등) 유지관리부서에서 교      체, 개량, 추가공사 등을 공고일 이후에 요구하여 발주기관에서 추가

공사를 지시한 경우.

□ 책임감리원 검토의견

❍ 920공구 건설공사와 관련 보도복구 규정변경 및 유지관리기관(송파구, 교통운영과) 의견을 수용하여 불투수블록, 아스콘+MMA도막 등을

시공토록 하였으며, 변경사항 실정보고 검토결과 적정함.

❍ 따라서 추후 설계변경시 조정된 계약금액을 반영코자 함

Ⅳ		조치의견

❍ 보도블록 및 자전거 도로에 대한 규격 변경은 유지관리기관 협의사항을 반영한 것으로서 책임감리원 의견과 같이 승인하고,

❍ 추가금액은 향후 본부 설계변경 소위원회 심의를 거쳐 설계변경 조치 및 총사업비 변경 시 반영코자 함.

붙임  책임감리원 실정보고 1부.  끝.