문서번호	도시철도토목부-13483
결재일자	2018.11.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
김성옥		방영복	11/16 代윤방식
협조
	주무관		유원하

『서울지하철9호선 3단계 918공구 건설공사』

차도복구(표층 등) 변경에 따른 실정보고에 대한 검토보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「서울지하철9호선 3단계 918공구 건설공사」

차도복구(표층 등) 변경에 따른 실정보고에 대한 검토보고

「서울지하철9호선 3단계 918공구 건설공사」차도복구(표층 등) 변경에 따른 책임감리원 실정보고에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		사업개요

❍ 공 사 명: 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

❍ 위    치: 서울시 송파구 잠실동 아시아 선수촌~삼전동 잠실병원

❍ 규    모: 총연장 1,290.7m(정거장 1개소, 본선환기구 3개소)

❍ 공사기간: 2010.02.19. ~ 2018.12.31.

❍ 도 급 비: 143,297백만원

❍ 시 공 사: SK건설 외 4개사

❍ 감 리 사: (주)서영엔지니어링 외 3개사

Ⅱ		추진경위

❍ 2017.09.20 : 지하철(9호선 3단계) 공사구간 포장도로 관리 협조요청

【동부도로사업소→도시기반시설본부, 도로관리과-15437】

❍ 2017.09.22 : 지하철(9호선 3단계) 공사구간 포장도로 관리 협조요청

【도시기반시설본부→감리단,시공사, 도시기반시설본부17-9417호】

❍ 2018.01.11 : 동부도로사업소 포장계획도 협의 (도로보수과 송광석 계장)

❍ 2018.03.23 : 동부도로사업소와 3단계 전 공구 회의 (재질 확정)

❍ 2018.04.12 : 포장범위관련 합동점검(동부도로사업소,도시기반시설본부,감리단,시공사)

❍ 2018.05.17 : 포장도로 관련 동부도로사업소 요청사항 알림

【도시기반시설본부→감리단,시공사, 도시기반시설본부18-4949호】

❍ 2018.07.09 : 도로복구 시공계획도 제출 (SK건설지918 제2018-381호)

❍ 2018.08.10 : 918공구 건설공사 최종보완교통처리계획통보

【서울특별시지방경찰청→도시기반시설본부, 교통관리과-19879호】

Ⅲ		보고내용

□ 주요변경 내용

❍ 포장구간 현황도

구분	현황도
본선개착1 ~ 본선개착2
931정거장 ~ 본선개착3

❍ 표층 포장 등 변경 내용

- 4차선이상도로 아스팔트 콘크리트(표층) 1등급골재 재질변경

: 2등급골재 #78 → 1등급골재 WC-3

- 삼전사거리구간 정지선 50m 전방 개질아스팔트(PG-22) 변경

- 추가 포장 구간 : 930S1환기구 시점, 터널2구간,정거장 사거리일부)

- 무단횡단방지시설 675m 추가설치(교통규제 심의 승인 사항)

- 표층재질 변경내용

구 분	당초(일반아스콘)	변경(요청재질)	비고
아스팔트 혼합물 입도	#78[WC-2(13mm)]	WC-3(19,20mm) or WC-5(19,20mm)
아스팔트 바인더 공용성 등급(PG)	PG 64-22 이상	PG 64-22 이상 or PG 76-22 이상(개질)
인장강도비	-	0.8이상(소석회 첨가)
골재	2등급	1등급 (편장석 10% 이하)

- 표층 단가적용 기준

구 분	포장 두께	재 질	단 가 적 용 기 준	비고
아스팔트 포설	t=5cm	1등급골재 WC-3	신규단가(자재비)+계약단가(시공비)	재질 변경
		개질아스팔트 PG-22	신규단가(자재비)+계약단가(시공비)
아스팔트 절삭	t=5cm	-	계약단가	추가 포장 구간
차선도색		융착식	계약단가

□ 변경수량 및 공사비 내역

❍ 재질 변경 및 수량

공 종	규격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증.감
아스팔트	#78[wc-2]	ton	3,062	0	감3,062	자재비(신규단가)
	1등급골재 WC-3	ton	-	3,595	증3,595
	개질아스팔트 PG-22	ton	-	155	증155
아스팔트절삭	t=5cm	a	-	57.38	증57.38	시공비(계약단가)
무단횡단방지시설	2000*900(ɸ180)	m	-	675	증675	자재비(신규단가)

❍ 공사비 변경 내역

(단위 : 백만원)

공 종	당초	변경	증.감	비고
직접공사비	115	448	증333
제경비 외	41	79	증37
총공사비	156	525	증370

□ 관련규정

❍ 입찰안내서 제3장 계약조건 (공사계약일반조건) 제21조 제4항 2호

제21조(설계변경으로 인한 계약금액조정의 제한 등)

① 정부의 책임있는 사유 또는 천재·지변 등 불가항력의 사유로 인한 경우를 제외하고는 그 계약금액을 증액할 수 없다.

④ 제1항에 정한 정부의 책임있는 사유 또는 불가항력의 사유란 다음 각호의 1의 경우를 말한다.

2. 발주기관 외에 당해공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어 이를 발주기관이 수용하는 경우

❍ 입찰안내서 제3장 계약조건 (지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건) 제19조 제2항 2호 가목

제19조(설계변경 등)

② 계약금액의 조정이 가능한 설계변경은 발주기관의 책임있는 사유 또는 천재·지변 등 불가항력의 인한 경우에 한하며, 일반조건 제21조제4항의 각호를 다음과 같이 구체적으로 규정한다.

2. 당해공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어 이를 발주기관이 수용한 경우

가. 도로부속시설물 중 유지관리부서에서 교체, 개량, 추가공사 등을 공고일 이후에 요구하여 발주기관이 추가공사를 지시한 경우

□ 계약금액 조정 검토

❍ 계약금액 조정(증 370백만원)

- ‘공사계약일반조건 제21조 제4항 2호’ 및 ‘지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건 제19조 제2항 2호 가목’에 의거 발주기관 외에 당해공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어 이를 발주기관이 수용하는 경우로써,

- 유관기관 요구사항(동부도로사업소: 표층포장, 서울지방경찰정 교통규제심의: 무단횡단방지시설)을 반영한 사항으로 계약금액 조정(증액)이 필요함.

❍ 단가적용

구 분	변경내용	비 고
표층	시공비 : 기 계약단가 재료비 : 신규단가	재료비 : 동부도로사업소 단가산출기초조사서 적용
무단방지시설	신규단가	재료비 : 조달청 나라장터 단가 적용

□ 책임감리원 검토의견

❍ 당초 설계인 아스콘(#78 2등급)을 1등급(WC-3)으로 재질 변경 사항과 동부도로사업소 추가 포장(터널2구간 및 정거장 구간) 요청 사항 및 서울지방경청 교통규제심의(무단횡단방지시설) 승인 사항을 반영하여,

❍ ‘공사계약일반조건 제21조 제4항 2호’ 및 ‘지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건 제19조 제2항 2호 가목’에 의거 발주기관 외에 당해공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어 이를 발주기관이 수용하는 경우로써 추가공사비(증 370백만원)는 발주처 설계변경 심의를 거쳐 계약금액 조정(증액)함이 타당하다고 판단됨.

Ⅳ		조치의견

❍ 차도(표층 등) 복구 변경은 유관기관 요구사항 따른 반영사항으로 책임감리원 의견과 같이 승인하고,

❍ 공사비는 향후 본부 설계변경소위원회 자문회의를 거쳐 설계변경 후 총사업비 변경 시 반영코자 함.

※ 차도(표층 등) 공사비 : 증 370백만원

붙임  책임감리원 실정보고 1부.  끝.