문서번호	설비부-15761
결재일자	2018.11.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	11/16 권오식
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

설계변경 소위원회 심의요청에 따른 검토보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

설계변경 소위원회 심의요청에 따른 검토보고

『남산예장자락 재생사업』시행중 소방재난본부 리모델링 공종이 추가됨에 따라 설계변경 소위원회 심의자료가 접수되어 검토 보고함.

1		공 사 개 요

□ 공 사 명: 남산예장자락 재생 전기공사

□ 규     모: 공원 15,154㎡, 주차장 10,015㎡(버스 39대, 장애인 2대)

□ 공사기간 : `17.08.01~`19.12.31

□ 공 사 비 : *************************************

□ 시 공 사: 한전산업개발(주) 외 1개사

□ 감 리 사: ㈜동성엔지니어링

□ 공 정 률 : 13%(소방재난본부 리모델링 옥외등 공종 진행)

2		관 련 근 거

□ 남산예장감리 제2017-51호(`17.11.13)

- 주공종 소방재난본부 리모델링에 따른 전기(소방포함)공사 내용 보고

□ 남산예장감리 제2018-138호(`18.05.17)

- 리모델링 범위 확대에 따른 전기공사 내용 보고

□ 남산예장감리 제2018-138호(`18.07.13)

- 리모델링 범위 확대에 따른 전기소방공사 내용 보고

□ 남산예장감리 제2018-384호(`18.11.16)

- 남산예장자락 재생사업 전기공사 설계변경 소위원회 자문요청

3		소위원회 심의요청 내용

□ 설계변경 내용

□ 변경사유 : 당초 본 사업의 범위에 소방재난본부 리모델링이 없었으나,     주공종(토목,건축)에서 리모델링 진행하여 전기공사(소방포함) 내용 추가

□ 공종별 변경내용

공 종		추가공사 내용	변경금액 (직접비)
전기	전력간선공사	·분전반 3면 외 전력간선 공사	증)29,298천원
	전열공사	·지하1층, 지하2층 콘센트류 53개 설치 (배관,배선 포함)	증)11,903천원
	전등공사	·지하1층, 지하2층 각종 등기구 189개 설치(배관,배선,레이스웨이 포함)	증)58,162천원
	옥외보안등공사	·옥외등주 5본 설치(배관,배선 포함)	증)3,340천원
전기소방	자탐설비공사	·화재감지기 89개 설치(배관,배선 포함) ·시각경보기 3개 설치 ·화재수신기 교체 및 소방펌프류 밸브 감지선로 구성	증)49,820천원
	유도등공사	·유도등 48개 설치(배관, 배선포함)	증)16,749천원
	비상조명등	·비상조명등 13개 설치(배관, 배선포함)	증)4,518천원
<직접비 소계>			증)173,789천원

□ 단가산정 기준

구분	반영내용	관련근거
감소물량	없음	공사계약일반조건 제7절 제1호 나항(계약상대자의 책임없는 사유)
증가물량	신규단가에 낙찰률(86.745%) 적용
신규비목	〃

□ 설계변경 심의 요청금액(총차 계약금액)

당초	변경	증감액
***************	***************	*************

4		보고자 의견

□ 위 설계변경 사항은 기 실정보고 승인된 사항으로 건설사업관리자의 보고 내용이 적정하다고 판단되므로 설비부 설계변경 소위원회 심의이행 후 설계변경 추진하고자 함.

붙임 : 감리단 공문 1부. 끝.