투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(A/V설비) 납품기한 변경 의뢰(남부도로사업소 청사 신축 통신공사)

1. 삼우(도시기반) 제18-1113-2(2018.11.13.)호와 관련입니다.

2.『남부도로사업소 청사 신축 통신공사』관급자재(A/V설비) 납품기한 변경을       아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 납품기한 변경내용

순번	계약번호	계 약 자	납 품 기 한
			당 초	변 경
1	00177046500	㈜인터엠	2019.01.05.	2019.12.15.
2	00168302711	㈜인터엠	2018.12.07.	2019.12.15.
3	00168303609	㈜디라직	2018.12.07.	2019.12.15.
4	00178017604	㈜동성씨앤티	2018.12.07.	2019.12.15.
5	00168322901	동원이엔지 합자회사	2018.12.07.	2019.12.15.
6	00166106710	삼성전자(주)	2018.11.22.	2019.12.15.
7	00166181602	한결하이테크	2018.11.26.	2019.12.15.
8	00166164013	유환아이텍(주)	2018.11.21.	2019.12.15.
9	00176025602	한결하이테크	2018.11.26.	2019.12.15.
10	00165132002	한결하이테크	2018.12.07.	2019.12.15.

붙임  감리단 공문 및 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김현욱		열빛총괄과장	유병기		설비부장	11/16 권오식
협조자	경리과장	이현숙
시행	설비부-15747	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	hyunkim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)