문서번호	교량안전과-20160
결재일자	2018.11.16.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
이회진		代서성만	11/16 김종호
협조

- 2018년 도림천고가 보수공사 -

예비준공검사 실시 계획

2018. 11.

안전총괄본부

(교량안전과)

- 2018년 도림천고가 보수공사 -

예비준공검사 실시 계획

「2018년 도림천고가 보수공사」준공 시기가 도래함에 따라 예비준공검사 실시계획을 보고 드림

Ⅰ		근 거

□ 예비준공검사 수행계획 보고(감리18-1136, ‘18.11.16)

□ 기술심사담당관 제10083호(2018.6.28.)

○ 건설공사 예비준공검사 시행방법 개선

□ 국토교통부고시 제2015-473호(2015.6.30.)

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제104조

(준공검사 등의 절차)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 2018년 도림천고가 보수공사

□ 공사기간 : 2018. 5. 21. ~ 2019. 1. 15

□ 예비준공검사 금액 : ***********

○ ********************************************

□ 공사내용

○ 교면방수 및 포장 99.64a, 콘크리트 단면보수 247㎡,

○ 콘크리트 균열보수 60m, 연석철거 및 재설치 341m 등

□ 계약상대자 : ㈜송림건설

Ⅲ		예비준공검사 계획

□ 검사일시 : 2018.11.21.(수) 15:00~

○ 검 사 자 : ********************

○ 입 회 자 : 1종교량 보수‧보강공사 건설사업관리단 및 현장대리인

- ********************

- ************

□  검사방법

○ 설계도서(내역서, 도면, 검측내역 등) 적정 여부

○ 시공상태 적정 여부

○ 지급자재 사용 적정 여부

○ 폐품 및 발생물의 유무 및 처리의 적정 여부 등

Ⅳ		향후계획

□ ’18. 11. 30. : 검사결과 보완조치 및 정산 설계변경(최종)

□ ’18. 12. 14. : 변경계약 / 준공검사 / 준공

붙임 : 예비준공검사 조서(서식) 1부.