문서번호	물재생계획과-14236
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	하수정비팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
김민석	이두환	하상문		11/20 배광환
협 조
	하수계획팀장		김준형
	배수설계팀장		심형보

노후하수관로 정비공사 국비 배정에 따른

‘18년 도로함몰 예방 정비공사(하반기 2차 ) 추진 계획

2018. 11.

물순환안전국

【 물재생계획과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

‘18년 도로함몰 예방 정비공사(하반기 2차 ) 추진 계획

’18년 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비사업 추진과 관련 국고 보조금이 교부(당초 391억원→변경 239억원)되어 이에 따른 사업 추진 계획을 보고 드림

□ 사업개요

○ 사 업 명 : ‘18년 도로함몰예방 노후 하수관로 정비사업

○ 규   모 : 노후하수관로 정비 84㎞

○ 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 12.

○ 사업예산 : 1,263억원(국비 391억원, 시비 872억원)

(단위 : 억원)

‘18년 정비계획				상반기(1,2차 용역 조사분)				하반기(3차 용역 조사분)
연장(㎞)	공사비	시비	국비	연장(㎞)	사업비	시비	국비	연장(㎞)	사업비	시비	국비
84	1,263	872	391	29	409	409	-	55	854	463	391

□ 추진경위

○ ‘18. 2.28. : ’18년 도로함몰 예방 노후하수관로 정비 계획

- 조사용역(3차) 진행중으로 1,2차 조사분은 상반기, 3차분은 하반기 공사 시행

○ ‘18. 2.28. : 국고보조금 재원 협의 요청(국비 391억원에 대한 재원 협의)

○ ‘18. 4~5. : 상반기 공사 발주 및 착공(15개구 26권역, 409억원)

○ ‘18. 6.15. : 조사용역(3차) 준공

○ ‘18. 7.13. : 하반기 공사 추진계획 수립

-  국비 재원 협의 중(미배정)으로 하반기 사업 시비 우선 배정(13개구 25권역, 463억원)

○ ‘18.10. 4. : 노후하수관로 정비사업 재원협의 결과 통보(한강유역환경청)

-  총사업비 126,300백만원중 국고 미지원 항목 등을 제외한 119,440백만원으로 사업비 조정

○ ‘18.10.31. : 국고보조율에 대한 검토의견 조회(환경부)

- 총사업비 119,440백만원에 대해 광역시 보조율 20%를 적용한 23,900백만원 배정

○ ‘18.11.14. : 국고보조금 교부결정 통보

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***************************

****************************

********************************************************************************************************************

**************************************************************

****************************

*********************************

*********************************************************************************************************

*******************************************************************

**********************************

*****************************************

******************************************************************************************

□ 사업 추진계획

○ 사업개요(하반기분 2차)

구 분	사 업 내 용	비고(해당자치구)
대상구역	12개구 21권역	종로, 광진, 중랑, 강북, 노원, 양천, 금천, 관악, 서초, 강남, 송파, 강동
사 업 비	391억원(국비 239억원, 시비 152억원)
규 모	26㎞(전체 19,175m, 부분 1,414개소)
사업기간	‘19. 1. ~ 9.

**************

****************************************

**************************************

**********************************************************************************************************************************************

○ 시행방법 : 조기발주

- 실시설계 기 완료된 사업으로 신속한 사업 추진을 위해 조기 발주(‘18년 12월 중)하여 ‘19년 1월중 공사 계약(착공)할 수 있도록 사전 절차 이행

○ 추진일정

- ‘18. 11. : 계약심사

- ‘18. 12. : 공사 발주

- ‘19.  1. : 공사 계약 및 착공

※ 1~2월 CCTV 등 현장 조사 완료(굴착 통제기간 이후 개착공사 시행)

- ‘19.  9. : 공사 완료

□ 행정사항

○ 자치구 권역별 설계도서 배포(서울시) ---------- ‘18. 11. 23.이내

○ 계약심사 의뢰(자치구)  ----------------------- ‘18. 11. 30.이내

○ 공사 발주(자치구)      ----------------------- ‘18. 12. 10.~14.

○ 예산 재배정(서울시)    ----------------------- ‘19. 1월 중

붙임  자치구별 하반기(2차) 사업비 편성 내역 1부.

**********************************

**	***	*********			****			**
		**	**	**	*****	*******	********
	****	******	******	******	******	******	*****	**
*	***	*****	*****	***	*****	*****	**	*
*	***	*****		*****	*****	*****	**	*
*	***	*****	*****	***	*****	*****	***	*
*	***	*****	*****	***	*****	***	**	*
*	***	***	***	***	***	***	**	*
*	***	*****	*****	*****	*****	*****	***	*
*	***	*****	*****	***	*****	*****	**	*
*	***	*****	*****	*****	*****	*****	***	*
*	***	*****	*****	*****	*****	*****	***	*
**	***	*****	*****	***	*****	*****	***	*
**	***	*****		*****	*****	***	**	*
**	***	*****		*****	*****	*****	**	*

***************

***************************************

***********************************