문서번호	기전과-5631
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
양상규		임태수	11/20 박기범
협조
	주무관		김용문

『2018년 교통사고 잦은 곳 등 개선 교통신호기공사』

공사실정보고에 대한 검토보고

2018. 11.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2018년 교통사고 잦은 곳 등 개선 교통신호기공사』

공사실정보고에 대한 검토보고

“2018년 교통사고 잦은 곳 등 개선 교통신호기공사”와 관련하여, 책임감리원 공사실정보고에 대한 검토결과를 보고합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

서울특별시지방경찰청 교통관리과-25524(2018. 10. 17.)

【교통안전시설 개선설치 통보(하달)[신림소방치안센터 앞(관악)]】

㈜태영알앤디 태영(신) 2018-87(2018. 11. 19.)

【2018년 교통사고 잦은 곳 등 개선 교통신호기공사 실정보고 건】

Ⅱ		공 사 개 요

공  사  명 : 2018년 교통사고 잦은 곳 등 개선 교통신호기공사

공 사 위 치

- 구로디지털단지입구(관악구 시흥대로 554) T-GIS명: 구로디지털단지입구

- 원당초교입구(관악구 남부순환로 1852) T-GIS명: 원당초교입구

- 신림소방치안센터 앞(관악구 봉천동 729-29) T-GIS명: 롯데백화점관악

도  급  비 : 금216,524,087원(금이억일천육백오십이만사천팔십칠원)

공 사 내 용 : 교통사고 잦은 곳 및 중대한 사고 발생지점 시설개선

공 사 기 간 : 2018. 7. 13. ~ 2018. 11. 30.

시 공 업 체 : *************

감 리 업 체 : *************

설 계 업 체 : ****************************

Ⅲ		실 정 보 고

주요 실정보고

연번	위치(TGIS명)	변경전	변경후	변경사유	증·감 금액(원)	비고
01	구로디지털 단지입구	- 음향신호기 신설 8대 - 지주부착대 6M 신설 1본 - 지주부착대 5M 철거 1본 - 지주부착대 9M 철거 1본 - 제어기 차광막 신설 1개 - 아스팔트 횡단굴착(야간) 42M - 소형 고압블럭 굴착 96M - PE전선관 배관(ø100 2열) 68M - 후강전선관 배관(ø104 2열) 42M - 신호케이블 신설 662M - 신호케이블 철거 634M	- 음향신호기 신설 0대 - 지주부착대 7M 신설 1본 - 지주부착대 5M 철거 0본 - 지주부착대 11M 철거 1본 - 제어기 차광막 신설 0개 - 아스팔트 횡단굴착(야간) 0M - 소형 고압블럭 굴착 0M - PE전선관 배관(ø100 2열) 0M - 후강전선관 배관(ø104 2열) 0M - 신호케이블 신설 60M - 신호케이블 철거 0M	- 음향신호기 상태 양호하여 앞버튼 등 일부 교체로 물량 변경 반영 - 지주부착대 규격 현장상황에 맞게 변경 반영 - 기존 부착대 사용으로 철거물량 삭제 - 지주부착대 11M 철거 규격 변경 - 제어기 차광막 설치 필요성 감소에 따른 물량 삭제 반영 - 기존 신호선 및 전선관 재사용으로 굴착물량 및 신호케이블 설치물량 내역 변경 반영	감 26,056,648
02	원당초교입구	- 제어기 부분품(LSU) 5개 - 제어기 부분품(Flash) 1개 - 음향신호기 신설 7대 - P12,14신호지주(ø250) 신설 0본 - 아스팔트 횡단굴착(야간) 90M - 소형 고압블럭 굴착 31M - 후강전선관 배관(ø104 2열) 90M - 신호케이블 신설 553M - 신호케이블 철거 544M	- 제어기 부분품(LSU) 0개 - 제어기 부분품(Flash) 0개 - 음향신호기 신설 0대 - P12,14신호지주(ø250) 신설 2본 - 아스팔트 횡단굴착(야간) 0M - 소형 고압블럭 굴착 0M - 후강전선관 배관(ø104 2열) 0M - 신호케이블 신설 836M - 신호케이블 철거 736M	- 신호운영에 지장없는 신호제어기 부분품 물량 삭제 반영 - 음향신호기 상태 양호하여 일부 이설 물량만 내역에 반영 - 연등구간 지주 교체 추가 등으로 신호지주 설치물량 내역 반영 - 기존 신호선 일부 재사용, 굴착 불가로 굴착물량 변경 반영 - 연등구간 신호케이블 설치물량 변경 내역 반영	감 20,808,027
03	신림소방치안센터	- 신호제어기 신설 0대 - 지주부착대 9M 신설 0본 - P5 신호지주(ø200) 신설 0본 - 아스팔트 횡단굴착(야간) 48M - 스톤블럭 굴착 89M - 소형 고압블럭 굴착 8M - PE전선관 배관(ø100 2열) 81M - 후강전선관 배관(ø104 2열) 48M - 신호케이블 신설 531M - 신호케이블 철거 112M - 판석 붙임/포장 0㎡	- 신호제어기 신설 1대 - 지주부착대 9M 신설 1본 - P5 신호지주(ø200) 신설 1본 - 아스팔트 횡단굴착(야간) 22M - 스톤블럭 굴착 12M - 소형 고압블럭 굴착 33M - PE전선관 배관(ø100 2열) 0M - 후강전선관 배관(ø104 2열) 22M - 신호케이블 신설 897M - 신호케이블 철거 679M - 판석 붙임/포장 34㎡	- 규제 변경 반영을 위한 교통신호제어기 연등분리 및 제어기 신설 내역 반영 - 규제 변경으로 지주부착대 규격 변경 - 노후지주 교체 추가 등으로 신호지주 설치물량 내역 및 신호케이블 교체물량 내역 반영 - 기존 신호선 일부 재사용, 굴착불가로 굴착물량 및 신호케이블 설치물량 변경 내역 반영 - 보도 굴착복구 원인자복구로 인한 신규 일위대가 적용 및 내역 반영	증 21,434,154

※ 세부내역은 실정보고 내역서 참조

신규 일위대가 적용

품명	규격	적용사유	비고
석재판 붙임/포장	고흥석 520×520×30	- 롯데백화점관악점 앞 보도굴착복구 원인자복구로 인한 신규 일위대가 적용함. - 신규 자재단가 낙찰율 적용(87.5092%)

설계변경금액                                                   (단위:원)

구분		당초	변경	증·감	비고
도급비	공급가액	196,840,080	159,698,317	감 37,141,763
	부가가치세	19,684,007	15,969,831	감 3,714,176
	합계	216,524,087	175,668,140	감 40,855,947	원단위 절사함

책임감리원 기술검토 의견

- 상기와 같이 당초 설계도서와 현장상황이 상이한 부분을 현장여건에 맞게 적용하고 서울지방경찰청 변경규제 심의내용을 반영하여 시공하는 것이 타당함.

Ⅳ		보고자 검토의견

현장여건에 따른 작업물량 변경, 신규 일위대가 적용 및 서울지방경찰청 변경 규제 심의내용을 반영하기 사항으로

책임감리원이 실정보고한 내용을 종합 검토한 결과 적정하다 사료됨으로 이를 반영하고, 책임감리원에게 통보하고자 함.

Ⅴ		행 정 사 항

2018. 11. 26.  : 설계변경 시행(관리단속과)

2018. 11. 30.  : 공사준공

붙임 : 1. 책임감리원 실정보고서 1부

2. 실정보고 내역서 1부.  끝.