문서번호	공원사업과-2245
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원사업과장	공원부장
박종민	송경수	11/20 김인숙

한강드론공원 정비공사 설계변경 시행

2018. 11.

한 강 사 업 본 부

(공원사업과)

한강드론공원 정비공사 설계변경 시행

「한강드론공원 정비공사」 추진과 관련하여 아래와 같이 설계변경 시행하여

공사추진에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018 한강드론공원 정비공사

○ 위    치 : 광나루한강공원 내

○ 공사내용 : 잔디식재 2,700㎡

○ 공사기간 : 2018. 10. 29. ~ 2018. 11. 27.

○ 총공사비 : 금49,050,000원

○ 도급업체 : 태림조경(주) 대표 정명선

□ 설계변경 사유 및 세부내용

○ 설계변경 사유

- 드론공원 공역 및 활주로 조정에 따라 비행라인을 조정하여 라인 도색 필요

드론공역 및 비행라인 조정(안)

제거(노란색)

도색(흰색)

활주로 확장

- 설계에 반영된 제비율(건강보험료,연금보험료,산업안전보건관리비,환경보전비 등)을 관련규정에 따라 실제 사용한 비용으로 정산

○ 설계변경 세부내용

공 종 명	세부내용
라인 제거 및 도색	- 라인제거 0m → 510m - 라인도색 0m → 250m
제비율	- 제비율 실비 정산

□ 예산 변경사항

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총 공 사 비		49,050,000	48,829,000	감221,000
도급비	공급가액	44,590,909	44,390,000	감200,909
	부가가치세	4,459,091	4,439,000	감20,291
	계	49,050,000	48,829,000	감221,000

□ 조치계획

- 비행라인 도색 및 제비율에 따라 실비 정산 시행하고자 함. 끝.