문서번호	설비부-15869
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
손영일		임병국	11/20 권오식
협조

서울바이오허브 조성 통신공사(2차)

설계변경 검토 보고

2018. 11.

도시기반시설본부

[설 비 부]

서울바이오허브 조성 통신공사(2차)

설계변경 검토 보고

『서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사(2차)』와 관련, 건설사업 관리단으로부터 제출된 변경설계 실정 보고건에 대하여 검토후 아래와 같이 보고드림.

1		현 황

❏ 공사개요

❍ 공 사 명 : 서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사

❍ 공사규모 : 신관동(대수선) 지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡, 연구시설

별관동(신축)   지하2층/지상4층, 연면적 3,112㎡, 연구시설

❍ 공사내용 : 통합배선, CATV설비, 방송설비, CCTV설비, A/V설비, 비상벨

❍ 공사기간 : 2차‘18.03.20.~‘19.08.14. (총차‘17.09.28.~‘19.08.14.)

❍ 도 급 액 : 2차 490,191,540원 (총차 540,191,540원)

❍ 시 공 사 : ㈜세우엔지니어링

❍ 건설사업관리단 : ㈜한국종합건축사사무소

❏ 관련근거

❍ 신관동 평면 변경에 따른 실정보고 및 우선시공 요청

[한종홍릉 제2018-1012호, 2018.11.19.]

2		설계변경 검토

❏ 설계변경 사유

- 신관동 실배치 변경으로 인한 전선관, 통신케이블,모듈라잭 등 수량 변경

- 신관동 준공연기(18.11.30 → 19.01.31)에 따른 관급자재 납품기한 연기

- 관급자재중 통합배선반 및 네트워크장비의 물량변경 및 통합배선반의 별관동    물량 추가

❏ 주요공정별 증감내용

❍ 도급공사

장소	품명	단위	변경전	변경후	증·감	비 고
신관동	강제전선관	m	1,435	1,824	증) 389	통합배선,CATV,방송공사
	아웃렛,스위치박스	개	202	291	증) 89	통합배선,CATV
	UTP케이블	m	7,760	10,648	증) 2,888	통합배선,방송공사
	모듈라잭	개	134	236	증) 102	통합배선
	누설동축케이블	m	1,461	1,742	증) 281	CATV

종 류	단위	변경전	변경후	증·감	비 고
통합배선반	set	1	1	-	실배치 증가로 인한 내역서 수량 증가
네트워크장비	개	104	105	증) 1	네트워크스위치 1개

❍ 관급자재(신관동)

❏ 설계변경

구 분	변경전	변경후	증·감	비고
2 차	490,191,540	527,171,000	증) 36,979,460
총 차	540,191,540	575,107,000	증) 34,915,460

금액                                             (단위: 원)

※ 1차공사는 ‘18.05.24. 준공 (준공금액 47,936,000원)

❏ 관급자재 계약금액 변경 및 납품기한 연기

❍ 계약금액 변경

건 명	계약금액(원)			장 소
	당초	변경	증감
통합배선반	112,175,000	164,665,320	증) 52,490,320	신관,별관동
네트워크장비	81,932,710	83,999,720	증) 2,067,010	신관동

※ 미발주한 별관동의 통합배선반을 신관동의 통합배선반에 내역 추가

❍ 납품기한 연기

건 명		납품기한			비 고
		당초	변경	연장일
통합배선반	신관동 별관동	‘18.11.30.	‘19.08.14.	증) 257일
영상감시장치	신관동	‘18.11.30.	‘19.01.31.	증) 62일
네트워크장비	신관동	‘18.11.30.	‘19.01.31.	증) 62일
전관방송 및 AV설비	신관동	‘18.11.30.	‘19.01.31.	증) 62일
	별관동	‘18.12.22.	‘19.08.14.	증) 235일

❏ 건설사업관리단 검토의견

❍ 신관동 평면변경에 따른 변경시공에 대한 내역변경과 공사 일정상 관급자재의 납품기한 연기가 적정하다고 판단되며,

❍ 실정보고 사항에 대한 공정계획상, 선행공정(건축공사) 및 후속공정(통신공     사)의 원활한 공정관리를 위해 우선시공이 필요하다고 판단됨,

3		보고자의견

❍ 본 공사 건설사업관리단의 기술의견사항을 검토한 결과, 내용이 적정하다고 판단되므로 계약금액 변경 및 관급자재 납품기한을 연장하여 공정 관리에 차질이 없도록 조치하고자 함.

따로붙임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝.