문서번호	설비부-15871
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
손영일		임병국	11/20 권오식
협조

「중랑천 초안산앞 보행교량설치 전기공사(총차,2차)」

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

도시기반시설본부

[설 비 부]

「중랑천 초안산앞 보행교량설치 전기공사(총차,2차)」

준공기한 연기 검토 보고

우리 본부에서 시행중인「중랑천 초안산앞 보행교량설치 전기공사」에 대해 책임건설사업관리단의 준공연기 요청사항에 대한 검토하여 보고드림.

1		현 황

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 중랑천 초안산앞 보행교량설치 전기공사

○ 위    치 : 노원구 월계동 월계역 ~ 하계동 청구아파트(중랑천)

○ 규    모 : 보행교량 설치 폭4.5m, 연장151m, 닐센아치교

○ 공사내용 : 경관조명설비, CCTV설비, 승강기 3대 전원설비

○ 도 급 액 : 총차 363,310,000원 (2차 213,310,000원, 1차 150,000,000)

○ 공사기간 : 총차 ‘17.03.24. ~ ’18.11.30. (2차 `18.01.24. ~ `18.11.30.)

○ 시공사/감리사 : ㈜화성이엔에프/㈜대한콘설탄트 외 1개사

□ 관련근거

○ “중랑천 초안산앞 보행교량 설치 전기공사” 공사기간 변경 및

관급자재(경관조명기구) 납품 연장 요청

[대콘(초안산) 제18-253호, 2018.11.16.]

2		준공연기 검토

□ 계약기간 연장

○ 연기사유

- 월계역사 접속구간의 철도보호지구내 교각설치 지연으로 토목   공사의 준공기간이 연장(‘18.11.30.→’19.04.30.)됨에 따라, 후속    공정인 전기공사의 공사기간도 연기가 필요.

○ 계약기간 변경내용

구 분	공사기간		연장일
	당 초	변 경
총 차	‘17.03.24.~‘18.11.30.	‘17.03.24.~‘19.04.30.	증) 151일
2 차	‘18.01.24.~’18.11.30.	‘18.01.24.~’19.04.30.	증) 151일

※ 계약금액(총차 및 2차)은 변경없음

○ 공사기간 연장 귀책 기관 : 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

□ 관급자재 납품기한 연장

○ 물 품 명 : 경관조명기구(교량측면)

○ 규격,수량 : LINE LED 14.4W, 117개

○ 계약금액 : 17,550,000원

○ 계 약 자 : ㈜누리플랜

○ 납품기한 : 기존 ‘18.11.30. → 변경 ’19.04.30.

○ 연기사유 : 공사기한 연장에 따른 납품시기 미도래

3		보고자 의견

○ 본 공사 건설사업관리단의 공사기간 등 기술의견사항을 검토한 결과, 적정한 것으로 판단되어 준공기한 및 납품기한을 연장  하여 공사관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리단 공문 1부. 끝.