문서번호	도시철도토목부-13584
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
★주무관		토목2과장	도시철도토목부장
유원하		방영복	11/20 정대현
협 조
	토목1과장			윤방식
	토목3과장			호경수
	궤도과장			최진규

『서울지하철9호선 3단계 건설공사 강재손료 외 27공종』

설계변경자문소위원회 개최결과 보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『서울지하철9호선 3단계 건설공사 강재손료 외 27공종』

설계변경자문소위원회 개최결과 보고

「서울지하철 9호선 3단계 건설공사」시행 중 공기연장 등으로 발생된 직접비 등 실정보고 건에 대하여 설계변경자문소위원회를 개최하고, 그 결과를 보고함.

Ⅰ		소위원회 개최 개요

□ 일    시 : 2018. 11. 16(금) 14:00~18:30

□ 장    소 : 도시기반시설본부 11층 회의실

□ 자문위원회 명단

구분	소속	성명	구분	소속	성명
위원장	도시철도토목부 (토목2과장)	방영복	외부 위원	㈜건화	황효석
내부 위원	도시철도계획부 (설계과)	안창호		제일엔지니어링	한정수
	도시철도토목부 (궤도과)	조규양		경빈개발㈜	권오규
간사	토목2과	유원하		극동엔지니어링	이섬범

□ 자문대상 : 총 39건(6개 공구)

○ 918공구 강재손료 외 5건 설계변경

○ 919공구 강재손료 외 1건 설계변경

○ 920공구 강재손료 외 15건 설계변경

○ 921공구 강재손료 외 2건 설계변경

○ 922공구 강재손료 외 1건 설계변경

○ 923공구 강재손료 외 9건 설계변경

Ⅱ		소위원회 자문결과

□ 자문회의 결과

자문내용	자문결과	자문의견 요약
설계변경의 타당성	가결
공법변경의 적정성	가결	-
대가산출 및 적용의 적정성·경제성	조건부 가결	○ 강재손료(6개 공구) - 계약공정표와 강재시공(강재별, 구간별) 및 철거일을 비교하여 공기연장에 따른 손료분만 적용 - 강재 매몰(존치)로 변경한 경우 손료제외 - 단가산출 시 잘못 적용한 운반비 제외(923공구) - 공기연장에 따른 손료분은 실적단가 개념으로 자재비 100% 인정하고 철거분은 매각하여 감액하는 것으로 검토 필요 ○ 가로등 복구(6개 공구) - 각 공구 공통 변경사항이나 단가차이가 있으므로 합리적인 단가적용 필요 - 설치비 및 케이블 포설비는 당초 계약단가로 하고, 자재비만 적용 검토 - 신규 자재단가 적용 시 물가변동조정금액 제외할 것 ○ 지수재 변경(918공구) - 자문대상 내역과 책임감리원 의견이 상이하므로 확인요함 ○ 재사용 강재 정산(920공구) - 재사용 강재손료 적용기준 명시할 것 ○ 938정거장 암굴착공법 변경(923공구) - 발파 시 실제 기울임 및 균열발생으로 인한 변경인지 민원으로 인한 변경인지 공법 변경사유 적정성 검토 필요.

Ⅲ		행정사항

□ 설계변경자문소위원회 지적사항 조치

○ 건별 10억 이상 증·감 사항은 보완 후 설계변경자문본부위원회 상정

○ 본부자문대상 외 사항은 지적사항 보완 후 공구별 설계변경 추진

□ 외부 자문위원 수당지급(계좌 입금)

○ 소요예산액 : 600,000원(150,000원 × 4인)

○ 예산과목 : 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비 및 부대비, 시설부대비.

붙 임  1. 설계변경자문소위원회 자문대상 1부.

2. 설계변경자문소위원회 의견서 각 1부.

3. 자문회의 참석자 명단 1부.

4. 자문회의 사진 1부.  끝.