문서번호	시설과-5381
결재일자	2018.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	조경팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김소연	이무림	김재균	11/21 박미애
협 조

남산공원 한남자락 정비 및 경관조성공사 추진계획

2018. 11.

중부공원녹지사업소

(시설과)

남산공원 한남자락 정비 및 경관조성공사 추진계획

국내외 관광객이 즐겨찾는 남산공원의 훼손된 녹지공간을 정비하고 특색있는 경관으로 확대 조성하여 다양한 볼거리를 제공하므로써 공원 이용객 만족도를 높이고자 함.

정비현황

위  치 : 남산공원 한남자락 야외식물원 일대

규  모 : 1,100㎡

현  황

- 해당 지역은 숲속 놀이터 주변에 위치하여 어린이 단체 이용률이 높으나,

- 휴게공간 부족 및 단조로운 경관, 나지화된 녹지로 인한 토사유실, 경관 불량 등으로 인해 공원 이용 만족도가 저하되고 있는 실정임.

대상지 야외식물원 그랜드하얏트
위치도	현황사진

추진방향

훼손된 녹지공간 재정비를 통한 경관 개선 및 토사 유실 방지

부족한 휴게 및 산책공간 확충을 통한 이용자 편익 증진 및 이용 활성화 향상

건조기 대비하여 급수시설 설치로 녹지대 유지관리 시스템 개선

세부 추진개요

정비기간 : 2018. 11 ~ 2019. 5

정비대상 : 야외식물원내 실개천 주변 녹지

규    모 : 1,100㎡

정비내용 : 수목 및 초화 · 이끼류 식재, 산책로 및 휴게공간 정비 등

- 식 재  공 사 : 청단풍 등 4종 11주, 고사리 등 3종 3,080본, 깃털이끼 214㎡ 등

- 시설물공사 : 산책로 105m, 등의자 7개소, 안내판 2개소, 목교 1개소, 급수시설 등

시행방법 : 공사 발주(일반공개입찰)

소요예산 : 금188,486천원(도급 153,230, 관급 35,256)

- 예산과목 : 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원  보수정비사업, 남산 및 산하공원 시설물 보수 정비, 시설비

향후계획

2018. 11 : 공사 발주 및 계약 의뢰

2018. 12 : 공사 계약 및 착공

2018. 12 ~ 2019. 5 : 공사 시행 및 준공

기대효과

노후공간 재정비를 통한 시민 불편사항 해소 및 다양한 볼거리 제공

공원환경 개선을 통한 공원 이용 활성화 및 만족도 향상

붙임  설계도서 1부(도면, 내역).  끝.