문서번호	도시철도설비부-10860
결재일자	2018.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
김경수		이명수	11/21 구자훈
협조

『지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사』  공기여과시설 변경설치 실정보고 검토

2018. 11.

서울시도기기반서설본부

(도시철도설비부)

『지하철9호선 3단계 918공구 건설공사』

공기여과시설 변경설치 실정보고 검토

‘9호선 3단계 정거장 공기여과시설 변경 설치’ 지시에 따라 추진한 918공구 (931정거장) 공기여과시설 변경 설치에 대한 실정보고 내용을 검토 보고함. ※ 관련근거 : 서영감리제2018-681호(2018.11.13.), 서영감리제2018-698호(2018.11.20.)

1		사업개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

❍ 공사기간 : 2010. 02 ~ ’18. 12. 31

❍ 계약금액 : 총 140,400백만원 (기계 : 16,214백만원)

❍ 계 약 자 : (주)SK건설       ❍ 감 리 단 : ㈜서영엔지니어링

2		추진경위

❍ ‘13.04.04 : 지하철 정거장 공기여과시설 개선 계획(도시철도설비부-2290)

❍ ‘16.06.09 : 9호선3단계 정거장 공기여과시설 설계변경 설치통보(본부⇒감리단)

❍ ‘18.11.13 : 918공구 931정거장 공기여과장치 설계변경 실정보고(감리단⇒본부)

❍ ‘18.11.20 : 918공구 931정거장 공기여과장치 설계변경 실정보고(감리단⇒본부)

3		실정보고 내용

❍ 변경사유(발주처 지시)

- 정거장 공기여과장치의 안정적인 성능 및 유지관리 편리성 확보를 위하여 외기도입부와 공조기 내부의 공기여과장치 개선

❍ 공기여과시설 변경사항

구분	당 초		변 경		용량 (CMH)	비고
	품 명	수량	품 명	수량
외기도입부	1차. 자동세정형 데미스터	2	1차. 메쉬 스크린	2	변경 없음
	2차. 오토 에어필터	2	2차. 동결방지용 자동세정형 데미스터 필터	2	“
공기조화기내	프리필터+전기집진기	5	자동세정형 정전필터 +중성능필터	5	“

❍ 가격조사 내역검토

- 시공사 실정보고 적용단가는 마곡역등 8개역 2008년 및 2013년 준공된 평균단가(원/CMH)를 적용 하였으나, 감리원에서 검토결과 가격조사 타당성이  부족한 것으로 판단되어 최근 설계된 하남선 1공구 단가를 적용하여 실정보고함.

- 단가산출 : 공기여과장치 구성 품목별 최저단가(원/CMH) 조사 적용

⁍ 하남선1공구, 별내선1공구, 공항철도 마곡역 3개 조사

- 신규단가 : 협의율 97.245%, {투찰율 94.49% + 100.00%}÷2] 적용, D/S 11.17%적용 (가격기준일2015.7월 지수 100.23, 착공일2010.2월지수90.156)

❍ 공사비 변경 현황

- 시공사 요청

(단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증 감	비 고
직접공사비	***********	***********	***********

- 감리원 검토적용

(단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증 감	비 고
직접공사비	***********	***********	************

4		조치의견

❍ 공기여과시설 변경설치 실정보고에 대해 시공사와 단가 산출에 대한  이견이 있으나, 책임감리원 검토내용이 타당하다고 판단되므로 감리원에서 검토한 금액으로 승인 통보코자 하며

❍ 감액공사비에 대해서는 설계변경자문(소)위원회 자문을 거쳐 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 1. 책임감리원 실정보고 검토의견서 1부.

2. 시공사 실정보고서 등 관련문서 1부. 끝.