문서번호	건축부-16642
결재일자	2018.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		의료시설과장	건축부장
문성재		이형재	11/21 임인구
협조

『시립중랑노인전문요양원 증축공사』

건설기술진흥법 안전관리비 실정보고 검토

2018. 11.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『시립중랑노인전문요양원 증축공사』

건설기술진흥법 안전관리비 실정보고 검토

우리 본부에서 시행하고 있는 시립중랑노인전문요양원 증축공사 안전관리계획서 작성에 따른 안전관리비 등을 반영하고자 실정보고 내용에 대한 검토 보고 임

공사개요

□ 용 역 명 : 시립중랑노인전문요양원 증축공사

□ 위    치 : 중랑구 양원역로 38(망우동 북부병원)

□ 규    모 : 지하1층/지상5층, 연면적 2,280.35㎡

□ 공사기간 : `17.12.20. ~ `19. 7.19.

□ 계약금액 : ***********************************

□ 시공자/감리사 : 용성종합건설㈜ 외 1개사/펨코엔지니어링(주) 외 1개사

실정보고 내용

□ 건설기술진흥법 제62조(건설공사의 안전관리)

○ 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 안전점검 및 안전관리조작 등 건설공사의 안전관리계획을 수립하고 이에 따라 안전점검을 하여야 한다

□ 건설기술진흥법 시행령 제98조(안전관리계획 수립) 제1항의 6의 가.

○ 안전관리계획 수립대상

- 발주자가 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사에 해당

□ 검토 내용

○ 안전관리비 항목 및 검토내용

구분	항 목	세 부 항 목	검토결과
1	안전관리계획서 작성 및 검토비용	안전관리계획서 작성 검토비용	적정함
2	공사현장의 안전점검 비용	정기안전점검 비용	적정함
3	주변건축물 등의 피해예방 대책비용	지하매설물 보호조치, 주변피해방지	해당없음
4	공사장 주변의 통행안전관리 대책 비용	공사시행 중 통행안전 및 교통소통	해당없음
5	공사 시행 중 구조적 안전성 확보 비용	공사시행 중 구조적 안전성 확보비용	적정함

안전관리비 증감 내역

□ 공사비 증감내역

구분	항 목	금 액		증 감	비 고
		당 초	변 경
안전관리비	안전관리계획서 작성 및 검토비용	-	**********	**********
	공사현장의 안전점검 비용	-	**********	**********	3회
	주변건축물 등의 피해예방 대책비용	-	-	-	해당없음
	공사장 주변의 통행안전관리 대책 비용	-	-	-	해당없음
	공사 시행 중 구조적 안전성 확보 비용	-	**********	**********
소 계			***********	***********
공급가액			***********	***********	낙찰율87.2696%적용
부가가치세			**********	**********
합 계			***********	***********

□ 단가의 적정성 감토

○ 견적서 대비 최저가(낙찰율 87.2696% 적용)

○ 원가계산 제비율 제외항목으로 원가계산서에 직접 반영

□ 책임건설사업관리자 검토 의견

○ 건설기술진흥법 시행령 제98조(안전관리계획의 수립)에 의거 안전관리계획 수립에 따른 동 시행령 제99조(안전관리계획의 수립기준)의 안전관리비가 반영 됨

○ 실정보고의 변경 사유, 원가계산서, 단가대비표 등을 검토한 결과 적정함으로 설계변경 함이 타당하다고 판단됨

처리의견

□ 책임건설사업관리자 검토 의견에 따라 건설기술진흥법상 안전관리비 반영 실정보고 내용이 적합하므로 공사내역 등 설계변경에 반영토록 승인(도급공사에 반영) 하고자 함.

붙임  실정보고(건설기술진흥법 안전관리비 추가) 검토 보고 1부.  끝.