문서번호	도시철도사업부-10728
결재일자	2018.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		신교통1과장	도시철도사업부장
왕태현		위성환	11/21 박동룡
협 조
	주무관			신익현

- 별내선(8호선연장)2공구 건설공사 -

수직구(#1,#2)가시설공법 설계변경 승인 검토 보고

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

- 별내선(8호선연장)2공구 건설공사 -

수직구(#1,#2) 가시설공법 설계변경 승인 검토 보고

별내선 2공구 건설공사 수직구(#1,#2) 가시설공법 설계변경 실정보고 승인 요청에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

❍ 공사계약 일반조건 제6절(공사 설계의 변경) 1.-가-4)

- 그밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

❍ 공사 시방서 1.1.9(설계변경 및 정산) 가-(5)

- 시공방법 변경 등으로 인한 수량 증감과 신규 공종이 추가되는 경우

□ 추진경위

❍ ‘18.06.29 : 환기구 가시설 변경에 대한 타당성 및 안정성 사전검토 요청(시공사→관리단)

❍ ‘18.08.09 : 수직구 가시설 공법변경 안전성 및 쉴드반입 적정성 자문회의(1차)

- 어스앙카를 버팀보로의 공법 변경에 대해 대부분 긍정적 의견이며 구조물   저촉, 단수 조정 등 설계 보완 의견 제시

❍ ‘18.08.27 : 환기구(#1,#2)가시설공법 설계변경 승인 요청(시공사→관리단)

❍ ‘18.09.06 : 수직구 가시설 공법변경 안전성 및 쉴드반입 적정성 자문회의(2차)

- 1차 자문의견 조치결과에 대해 긍정적 의견임

❍ ‘18.11.20 : 수직구 1,2번 가시설공법 설계변경 승인 요청(관리단→본부)

□ 설계변경내용

❍ 수직구(#1,#2)가시설공법 변경

- 어스앙카+H형강 사보강재 버팀(3열) → 강관사보강재버팀(5열)+강관중앙버팀(2열)

〈수직구 #1〉

당 초 어스앙카 + H형강 사보강재 버팀(3열)	변 경 강관사보강재버팀(5열)+강관중앙버팀(2열)

〈수직구 #2〉

❍ 공사비 증․감 현황

(단위 : 백만원)

공 종	당 초	변 경	증․감	비 고
수직구 가시설	8,656	8,606	-50

❍ 적용단가 검토

- 증․감된 공사량 단가 : 계약단가 적용

- 산출내역서에 없는 품목․비목 : 설계변경 당시 단가×낙찰률(81.202%) 적용

❍ 건설사업관리단 검토의견

- 시공사에서 요청한 수직구 가시설공법 변경을 검토한 결과, 공법변경으로         인한 안전성 및 적정성이 확보되고 공사비 적용단가 및 산출내역서가 적정        하게 산출된 것으로 사료됨.

□ 조치계획

❍ 건설사업관리단의 검토가 적정한 것으로 판단되므로 공사의 시급성을 감안하여 우선 설계변경 승인하고, 계약금액 변경은 설계변경위원회 심의등을 거쳐 조치코자함

붙  임 : 건설사업관리단 실정보고 1부.  끝.