문서번호	도시철도토목부-13663
결재일자	2018.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		토목2과장	도시철도토목부장
유원하		방영복	11/21 정대현
협조
	주무관		김성옥

『지하철9호선 3단계 918공구 건설공사』

계측비용 추가 실정보고(기간연장)에 대한 검토보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사」

계측비용 추가 실정보고(기간연장)에 대한 검토보고

「서울지하철9호선 3단계 918공구 건설공사」와 관련 공사기간 연장에 따른 계측비용 추가 반영 책임감리원 실정보고에 대한 검토 보고임.

※ 서영감리제2018-437호(‘18.11.01) 공기연장에 따른 물푸기 추가 실정보고

Ⅰ		사업개요

❍ 공 사 명: 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

❍ 위    치: 서울시 송파구 잠실동 아시아 선수촌~삼전동 잠실병원

❍ 규    모: 총연장 1,290.7m(정거장 1개소, 본선환기구 3개소)

❍ 공사기간: 2010.02.19. ~ 2018.12.31.

❍ 도 급 비: 143,297백만원

❍ 시 공 사: SK건설 외 4개사

❍ 감 리 사: (주)서영엔지니어링 외 3개사

Ⅱ		추진경위

❍ ‘10.02.19 : 공사 착공

❍ ‘16.02.17 : 최초 계약기간 종료

❍ ‘18.11.01 : 계측비용 추가반영 실정보고(감리단→본부)

Ⅲ		보고내용

□  관련근거

❍ 지하철9호선 3단계 건설사업 공사기간 조정 검토보고

- 공사기간 연장 : 2015년말 → 2016년말

[도시철도토목부-16559호(2015.12.28.)]

❍ 지하철9호선 3단계 기본계획 변경승인 알림

- 사업기간 변경 : 2015년 → 2018년

[도시철도토목부-14391호(2016.11.18.)]

□ 계약금액 조정 검토

❍ 공사기간 조정

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
공사기간	‘10.02.19~’16.02.18 (73개월)	‘10.02.19~’18.12.31 (107개월)	증)34개월

❍ 공사비 산출

(금액단위 : 천원)

구 분		단위	당초			변경			증‧감
			수량	단가	금액	수량	단가	금액
1. 직접공사비					200,992			280,696	증)79,704
계측비	계측수행	개월	58	2,925	169,672	81	2,925	236,956	증)67,284
	계측보고서 작성	개월	58	2,925	31,320	81	2,925	43,740	증)12,420
2. 제경비		식			91,632			127,970	증)36,338
3. 물가변동		식			50,603			70,669	증)20,066
공사비 계					343,227			479,335	증)136,108

※ 수량 및 단가산출

- 수    량 : 23개월(‘16.02.18 ~ ’17.12.31, 실제 계측 수행기간)

- 적용단가 : 기 계약단가(계측수행 2,925,378원/월, 보고서 작성 540,000원/월)

□ 책임감리원 검토의견

❍ 지하철9호선 3단계 기본계획 사업기간 변경(‘16년→’18년)으로 인하여 공사기간 연장에 따른 계측기 유지관리 추가반영 요청사항으로서,

❍ 증가된 공사비(136,108천원)는 공사계약일반조건 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경) 제①항의 5, 공사계약일반조건 제21조(설계변경으로 인한 계약금액조정의 제한) 제①·④항, 계약조건(지하철9호선3단계일괄공사계약특수조건) 제19조(설계변경 등) 제①항~제②항에 의거 추후 설계변경 시 계약금액 조정(증액)함이 타당하다 사료됨.

Ⅳ		조치의견

❍ 상기 책임감리원의 검토의견과 같이 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 공사기간 연장에 따른 계측기 추가비용은 본부 설계변경자문소위원회 자문을 거쳐 설계변경 조치하고, 총사업비 변경 시 반영코자 함.

※ 계측비용 추가 반영 : 증)136백만원

붙임  책임감리원 실정보고 1부.  끝.