문서번호	설비부-15949
결재일자	2018.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
전성완	여인웅	전결 11/21 권오식
협 조

천호대로(광나루역) 확장 전기공사

관급자재 납품 연기 검토 보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(설    비    부)

천호대로(광나루역) 확장 전기공사

관급자재 납품 연기 검토 보고

「천호대로(광나루역) 확장 전기공사」시행중 건설사업관리단으로부터 관급자재 납품 연기 보고서가 접수되어 이에 대한 검토보고임

1		관 련 근 거

○ 7차공사 관급자재 지급기한 연기요청(상징조형물 조명기구)

(천호수 제2018-530호, 2018.11.21.)

2		공 사 개 요

○ 공 사 명: 천호대로(광나루역) 확장 전기공사

○ 위    치: 광진구 구의동 58-15 ~ 광장동 388-10(아차산역~광나루역)

○ 공사기간: 2011. 6. 16. ~ 2018. 12. 20.

(7차: 2017. 9. 5. ~ 2018. 12. 20.)

○ 공사내용

- 수전전력 500kW, 지하차도 등기구 996개, 가로등주 80본 신설

- 지하보도 조명 및 환기설비, 경보설비 공사

- 지하차도 상부 조명, 수경시설, CCTV 설치 공사

- 상징조형물 경관조명 설치 공사

○ 도 급 비: 1,613,384천원(7차 896,307천원)

○ 공 정 률: 98.37%

○ 시 공 사: ㈜거성전설 대표 공병준

○ 감 리 사: ㈜수성엔지니어링 대표 박미례

3		추 진 경 위

○ ‘11. 6. 16 : 공사계약 및 착공

○ ‘17. 9.  4 ~ 9. 5 : 7차 공사 계약 및 착공

○ ‘17.12. 20 : 변경계약

- 준공기한 연기 : ‘17.12.31 → ’18.6.30

- 계약금액 변경 : 606,737천원 → 643,499천원

○ ‘18. 4.  3 : 변경계약

- 계약금액 변경 : 643,499천원 → 682,175천원

○ ‘18. 6. 25 : 변경계약 의뢰

- 준공기한 연기 : ’18.6.30 → ‘18.12.20

○ ‘18.10. 11 : 변경계약

- 계약금액 변경 : 682,175천원 → 896,307천원

○ ‘18.10.22 ~ 10.23 : 관급자재(LED경관조명기구 3종) 구매 발주 및 계약

4		검 토 내 용

○ 납품기한 연기 사유

- 구매요청시 제시한 납품기한(‘19.7.31.)과 상이하게 계약되었고           선행공정 준공연기 계획 및 현 공정상(상징조형물 선행공사 공정율 10%)         관급자재 남품기한 연기 필요

○ 납품기한 연기 내용

계 약 자 (납품요구번호)	품 명	물품식별 번 호	단위	수량	금액[원]	납품기한		비 고
						변경전	변경후
에코브릿지 (12-18-1-80217-00)	LED경관조명기구 10W	23351963	개	95	53,200,000	‘18.11.22	‘19.6.28	계약금액 변경없음
	LED경관조명기구 15W	23351968	개	53	22,790,000
	LED경관조명기구 18W	23121501	개	23	21,390,000

○ 납품기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

○ 자체상금 부과여부 : 미부과

건설사업관리단 검토 결과

○ 선행공사 일정 변경에 따라 경관조명의 납기일을 연장하는 것이 타당       하다고 판단되며 실 납품일자는 시공사의 공사진척에 따라 납품사와       조정할 필요가 있음

5		조 치 의 견

○ 건설사업관리단 검토보고 내용이 적정하다고 판단되어 실제 납품 및        설치 가능한 시점으로 연기 조치하여 공정관리에 만전을 기하고자 함

붙임  건설사업관리기술단 관급자재 연기 요청 공문 1부.  끝.