문서번호	도시철도토목부-13668
결재일자	2018.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		토목2과장	도시철도토목부장
유원하		방영복	11/21 정대현
협조
	주무관		김성옥

『지하철9호선 3단계 918공구 건설공사』

공사 중 전력비 실정보고(기간연장)에 대한 검토보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사」

공사 중 전력비 실정보고(기간연장)에 대한 검토보고

「서울지하철9호선 3단계 918공구 건설공사」와 관련 공사기간 연장에 따른 공사 중 전력비 추가 반영 책임감리원 실정보고에 대한 검토 보고임.

※ 서영감리제2018-436호(‘18.11.01) 공기연장에 따른 공사중 전력비 반영 실정보고

Ⅰ		사업개요

❍ 공 사 명: 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

❍ 위    치: 서울시 송파구 잠실동 아시아 선수촌~삼전동 잠실병원

❍ 규    모: 총연장 1,290.7m(정거장 1개소, 본선환기구 3개소)

❍ 공사기간: 2010.02.19. ~ 2018.12.31.

❍ 도 급 비: 143,297백만원

❍ 시 공 사: SK건설 외 4개사

❍ 감 리 사: (주)서영엔지니어링 외 3개사

Ⅱ		추진경위

❍ ‘10.02.19 : 공사 착공

❍ ‘16.02.17 : 최초 계약기간 종료

❍ ‘18.11.01 : 공사 중 전력비 추가반영 실정보고(감리단→본부)

Ⅲ		보고내용

□  관련근거

❍ 지하철9호선 3단계 건설사업 공사기간 조정 검토보고

- 공사기간 연장 : 2015년말 → 2016년말

[도시철도토목부-16559호(2015.12.28.)]

❍ 지하철9호선 3단계 기본계획 변경승인 알림

- 사업기간 변경 : 2015년 → 2018년

[도시철도토목부-14391호(2016.11.18.)]

□ 계약금액 조정 검토

❍ 공사기간 조정

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
공사기간	‘10.02.19~’16.02.18 (73개월)	‘10.02.19~’18.12.31 (107개월)	증)34개월

❍ 공사비 산출

(금액단위 : 천원)

구 분	단위	당 초		변 경		증‧감
		수량	금액	수량	금액
1. 공사중 전력비	식	1	218,609	1	331,685	113,076
2. 제경비	식		20,077		30,462	10,385
3. 물가변동	식		41,275		41,275	-
총 계			279,961		403,422	123,461

※ 단가산출

- 적용금액 : 공기연장 추가 공사 분은 실 납부금액(납부영수증 참조)

□ 책임감리원 검토의견

❍ 지하철9호선 3단계 기본계획 사업기간 변경(‘16년→’18년)으로 인하여 공사기간 연장에 따른 공사 중 전력비 추가반영을 요청사항으로서,

❍ 증가된 공사비(123,461천원)는 공사계약일반조건 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경) 제①항의 5, 공사계약일반조건 제21조(설계변경으로 인한 계약금액조정의 제한) 제①·④항, 계약조건(지하철9호선3단계일괄공사계약특수조건) 제19조(설계변경 등) 제①항~제②항에 의거 추후 설계변경 시 계약금액 조정(증액)함이 타당하다 사료됨.

Ⅳ		조치의견

❍ 상기 책임감리원의 검토의견과 같이 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 공사기간 연장에 따른 공사 중 전력비 추가비용은 본부 설계변경자문소위원회 자문을 거쳐 설계변경 조치하고, 총사업비 변경 시 반영코자 함.

※ 공사 중 전력비 추가 반영 : 증)124백만원

붙임  책임감리원 실정보고 1부.  끝.