문서번호	현장민원과-14567
결재일자	2018.11.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강동수도사업소장
김주경		정국량	11/21 윤순용
협 조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

노후 옥내급수관 세대배관 교체 4개년 추진계획

2018. 11. 21.

강동수도사업소

공용배관에 비해 다소 저조한 세대배관 교체 활성화를 위하여 4개년 추진계획을 수립하여 세대배관 교체를 적극적으로 추진하고자 함

노후 옥내급수관 세대배관 교체 4개년 추진계획

Ⅰ		현 황

추진방향

○ 노후 옥내급수관 교체공사 적극적인 추진으로 음용환경 개선

○ 노후 공용배관 교체공사와 병행하여 세대배관도 적극적인

홍보를 실시하여 2022년까지 교체 완료를 목표로 추진

사업개요

○ 노후 옥내급수관 교체사업 현황    (’18. 10월말 기준, 단위: 가구)

구분	대상	교체대상			멸실대상 주 택
		소계	교체완료	미교체
전체	61,165	54,450	39,791	14,659	6,715
세대배관	27,850	27,850	18,520	9,330	0
공용배관	33,315	26,600	21,271	5,329	6,715

- 총사업비 : 33,773백만원(2018년 10월말까지 집행액 14,641백만원)

- 사업기간 : 2007.7월부터 2022년까지(한시적인 사업임)

Ⅱ		추진실적

우리사업소 연도별 추진실적

(단위 : 가구)

구분	계	2007~ 2014	2015	2016	2017	2018.10
전체	39,791	25,932	4,520	6,830	1,986	523
세대배관	18,520	14,267	1,720	1,209	836	488
공용배관	21,271	11,665	2,800	5,621	1,150	35

Ⅲ		4개년 추진계획

사업목표 : 14,659가구

○ 연차별 추진계획

(단위 : 가구)

구분	계	기교체	4개년 추진계획
		’07~’18	소계	2019년	2020년	2021년	2022년
전체	54,450	39,791	14,659	4,988	5,800	2,500	1,371
세대배관	27,850	18,520	9,330	3,500	4,000	1,000	830
공용배관	26,600	21,271	5,329	1,488	1,800	1,500	541

홍보 계획

○ 2019년도 세대배관 교체 활성화 방안

(단위 : 가구)

계	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
3,500	200	300	400	400	400	300	300	400	400	400

- 상기와 같이 월별로 홍보 계획 가구수를 선정하여 개별가구 세대    배관을 직접 방문하여 안내문을 전달하면서 적극적으로 홍보

- 홍보 담당 : 옥내배관팀 4명(지원승인 담당 2명, 컨설팅 담당 2명)

○ 자치구 소식지, 지역신문 등을 적극적으로 활용하여 홍보

- 매월 자치구 소식지에 노후 옥내급수관 교체 홍보문 게재 요청

- 지역신문, 케이블TV 등을 활용 노후 옥내급수관 교체사업 홍보

○ 동 주민센터 등을 활용한 홍보․안내 강화(송파 27, 강동 18)

- 옥내급수관 지원 컨설팅 담당자가 동 주민센터를 직접 방문하여 홍보물 배부

- 자치구 민원실 및 건축부서에도 홍보물을 배부ㆍ비치

○ 사업소 관내 수도설비 공사업체를 활용한 홍보

- 162개 업체(송파 99개, 강동 63개)

○ 공용급수관 지원대상 아파트 공문 발송

- 36개 단지(송파 24개, 강동 12개)

○ 아파트 관리사무소를 직접 방문하여 홍보 활동 전개

- 노후 옥내급수관 교체 대상 아파트 단지를 직접 방문하여

사업설명, 의견청취 등 소통을 통하여 적극적인 사업추진 도모

붙임 : 아파트 현황(공용,세대배관 모두 교체된 아파트) 1부.  끝.