문서번호	시설보수과-6520
결재일자	2018.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	11/21 代이희신
협조
	주무관		이석근

『2018년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사』

준설 4차 작업지시 구간 변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『2018년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사』

준설 4차 작업지시 구간 변경 보고

『청계천 차집관거 성능개선공사』와 관련 정밀안전진단용역이 완료되어 준설 4차 작업지시 구간 청계5구역에서 용역시행 예정구간인 청계1구역

으로 작업 변경 보고임

Ⅰ		공 사 현 황

○ 공 사 명 : 2018년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2018.03.26. ~ 2018.12.31

○ 도 급 자 : (주)고광건영  대표 채학영

○ 도 급 비 : 434,211,970원

○ 공사개요 : 준설량 : 3,443㎥

- 기계준설(주간) 1,400㎥, 기계준설(야간) 1,494㎥, 버켓준설 200㎥

유입동준설 230㎥, U형수로 준설 100㎥, 백운동천준설 19㎥

Ⅱ		관 련 문 서

○ 시설보수과-5738(2018.10.22.)호로 청계천 성능개선공사 구간 준설 요청

Ⅲ		현 황 보 고

○ 청계천 좌안 청계5구역(고산자교~신답빗물펌프장) 청계천 성능개선공사 정밀안전진단용역을 위해 준설을 시행하려 하였으나 퇴적고가 평균 5㎝로 준설이 필요 없는 실정임

○ 추후 정밀안전진단용역을 신답빗물펌프장~용답역 구간을 실시할 예정임

Ⅳ		조 치 의 견

○ 기 작업지시된 청계5구역 준설은 준설량이 없어 정밀안전진단용역을 실시할 청계1구역(신답빗물펌프장~용답역) 구간으로 변경 시행하고자함

○ 개략공사비 : 180,999천원

- 청계1구역 : 1,750㎥×103,428원=180,999천원

Ⅴ		행 정 사 항

○ 우리센터와 계약한 『2018년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가)』에	작업지시하고 준설작업물량은 추정물량으로 추가 소요 공사비 발생시 공통

유지보수 예산을 사용 공사시행 하고자 하며 소요 공사비에 대하여 추후 설계 변경시 반영하여 정산 코자 하고자 함.

붙임서류 : 1. 시설보수과 관련 공문 1부.

2. 작업지시 변경구간 위치도 1부.  끝.