문서번호	도시철도토목부-13685
결재일자	2018.11.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
정삼기		호경수	11/21 정대현
협 조
	주무관			장대성

「서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사」

보도 복구계획 실정보고에 대한 검토 보고

2018. 11.

도시기반시설본부

도시철도토목부

「서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사」

보도 복구계획 실정보고에 대한 검토 보고

『서울 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사』와 관련 보도(재질변경) 복구계획 실정 보고가 있어 이에 대해 검토 보고 드림. ※ 유신감(921)18-833호(‘18.11.20.)

1		공사개요

○ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사

○ 공사구간 : 송파구 방이동 올림픽공원 남4문 ~ 올림픽공원역

○ 공사규모 : L=1,742m(개착 382m, 터널 1,360m)

- 본     선 : L=1,408m (터널: 1,360m, 본선환기구 : 48m ,3개소)

- 정  거  장 : L= 334m (2개소)

○ 공사기간 : 2009.12.31. ~ 2018.12.31.

(10차공사 : 2018. 1.16.～2018.12.31.)

○ 공 사 비 : 177,793백만원(10차공사 : 15,846.7백만원)

○ 시 공 자 : ㈜포스코 건설 대표 이영훈, 코오롱글로벌(주) 대표 윤창운

○ 감 리 자 : (주)유신 대표 성낙일

2		보고내용

□ 추진경위

○ ‘18. 5.11. : 보도 원상복구계획 협의 요청[도시철도토목부 → 송파구청 도로과]

○ ‘18. 5.24. : 도로시설물(보도) 원상복구 계획에 따른 변경 및 추가정비 재요청[송파구청 → 도시철도토목부]

○ ‘18. 5.25. : 도로시설물(보도) 복구계획 관련 송파구청 요청사항 알림

[도시철도토목부 → 감리단]

○ ‘18. 6. 8. : 보도 원상복구 계획 협의 결과 통보

[도시기반시설본부-18-5890, 도시철도토목부 → 감리단]

○ ‘18.11. 9. : 921공구 보도복구 재질변경에 따른 실정보고

○ ‘18.11.14. : 보도복구(재질변경)에 따른 실정보고 검토결과 보완지시

□ 주요변경내용

○ 935정거장 보도복구 현황도

935정거장 보도복구 현황도
당초
변경

○ 936정거장 보도복구 현황도

936정거장 보도복구 현황도
당초
변경

○ 주요 변경 내용

구 분	당 초	변 경 (송파구청 요구)	비고
보도블록	소형고압블록 (t=6~8cm)	투수블록(t=6cm) 차도블럭(t=8cm)	재질변경 : 3,978㎡ 추가 : 431㎡ (사유:블럭단위 재질변경)
자전거도로	투수콘	아스콘(t=7.5cm) 및 도막포장(MMA, t=2mm)	재질변경 - 포장수량(당초:519㎡,변경:200㎡) - 도막수량(당초:-㎡,변경:766㎡)
보차도경계석	-	200mm*250mm (기초 매립 100mm)	전체변경수량(1,146m)
볼라드	화강석	충격흡수식, Φ120*900mm	재질변경수량(당초:57개, 변경:74개)

○ 변경 단면

구 분	당 초	변 경(송파구청 요구)	비고
보도블록
자전거도로
보차도 경계석
볼라드

○ 실정보고 구간 현황도

구 분	현황도
935 정거장
936 정거장

- 실정보고 구간 수량 검토

구 분	단위	① 도급내역	② 실수량	증 감 (②-①)	비 고
935정거장 소형고압블록	㎡	2,587			당초 도급내역 수량
송파구청구간	㎡		1,918		금회 실정보고 수량
올림픽공원구간 (E/V#2주변)	㎡		172		투수블록 변경 시공 (금회 실정보고 미반영)
소 계	㎡	2,587	2,090	-496
936정거장 소형고압블록	㎡	3,147			당초 도급내역 수량
송파구청구간	㎡		2,060		금회 실정보고구간
올림픽공원구간 (동1문주변)	㎡		1,142		점토블록 변경 시공 (금회 실정보고 미반영)
올림픽공원구간 (동2문주변)	㎡		262		소형고압브럭 시공 (금회 실정보고 미반영)
올림픽공원구간 (테니스장 주변)	㎡		704		아스콘포장 변경 시공 (금회 실정보고 미반영)
소 계	㎡	3,147	4,168	1,021
수 량 계	㎡	5,734	6,258	524	증가분 수량 미반영

▶ 공원부 수량 산출은 당초 소형고압블럭으로 산출되었으나 시공은 공단 원상복구와 요구사항을 반영한 점토브럭 및 아스콘포장으로 재질변경 시공하였음.

▶ 이는 당초 계약내역 산출시 계약상대자의 책임이므로 재질변경 및 수량 증가분에

대하여는 미반영 함이 타당함.

3		검토내용

□ 변경사유

○ 921공구 지상부 복구공사 진행 중 935,936정거장 구간의 도로시설물 중 보도에 대한 송파구청의 요청(재질변경 외)이 있어 보도 복구 협의 안을 제출하여 최종 협의 결과 요청사항에 따라 변경된 사항임.

□ 변경공사비 검토                                     (단위 : 백만원, 부가세제외)

구 분		단위	당 초		변 경		증 감 (금액)	비고
			수량	금액	수량	금액
935 정거장	소형고압블록	㎡	2,587	14	669	4	-10
	투수블록(t=6cm)	㎡			2,291	117	117	추가 431포함
	차도블록(t=8cm)	㎡			58	6	6
	자전거(투수콘)	㎡	519	9			-9
	자전거(아스콘)	㎡			200	4	4
	자전거(도막)	㎡			460	15	15
	보차도경계석	m			753	42	42
	볼라드(화강석)	ea	57	2			-2
	볼라드(충격흡수)	ea			60	16	16
	소 계			25		203	178
936 정거장	소형고압블록	㎡	3,147	17	1,087	6	-11
	투수블록(t=6cm)	㎡			2,060	106	106
	자전거(도막)	㎡			306	10	10
	보차도경계석	m			393	22	22
	볼라드(충격흡수)	ea			14	4	4
	소 계			17		148	131
직접공사비 계		식		42		351	309
제경비		식		25		85	60
공사비계		식	1	67	1	436	▲369	증)

□ 단가 산출 검토

1) 단가적용 현황

구 분	감소된 물량	증가된 물량	신규 물량	비 고
적용기준	기계약단가 (ES 포함)	협의단가 (18.03)	신규단가 (‘18.3)

※ 계약단가 = 소형고압블럭 등 당초내역상 감소된 물량 적용

※ 협의단가 = [기계약단가 + 변경 당시 산출단가] ÷ 2

※ 신규단가 = 소형고압블럭→투수블럭 사용재료가 변경되어 적용

2) 단가적용기준

- 적용일자 : 도로시설물(보도) 원상복구 요청 회신 기준(‘18년3월7일)

- 단가품적용 : 송파구청 2018년 건설공사 설계지침

- 자재가격 : 2018년 3월(조달단가, 물가자료, 유통물가, 거래가격, 물가정보)

- 노임단가 : 2018년 상반기(대한건설협회 시중조사) 노임단가

4		관련규정

○ 지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건 제19조(설계변경 등)

- ① 일반조건 제19조, 제19조의2, 19조의3, 제19조의4, 제19조의6,         제19조의7,제20조, 제23조에 따라 설계변경이 이루어지더라도 전체       공사에 대하여 증감되는 금액을 합산하여 계약금액을 조정하되 계약금

액을 증액할 수 없다.

다만, 제2항의 사유에 의한 경우는 계약금액을 조정할 수 있다.

- ② 계약금액의 조정이 가능한 설계변경은 발주기관에 책임 있는 사유

또는 천재․지변 등 불가항력의 사유로 인한 경우에 한하며, 일반조건

제21조 제4항의 각호를 다음과 같이 구체적으로 규정한다.

2. 발주기관외에 당해공사와 관련된 인허가기관 등의 요구가 있어

이를 발주기관이 수용하는 경우는 다음과 같다.

가. 서울특별시(도시기반시설본부, 구청 및 사업소를 포함한다)에서 유지관리하는 도로 부속 시설물중 지하철공사와 관련이 없는(상수도, 하수도, 가로수 및 수목, 포장, 신호 시스템 등)유지관리부서에서 교체, 개량, 추가공사 등을 공고일 이후에 요구하여 발주기관에서 추가공사를 지시한 경우.

5		책임감리원 검토의견

○ 입찰안내서 『제3장 계약조건(공사계약일반조건) Ⅶ. 계약금액의 조정

2. 대형공사의 설계변경으로 인한 계약금액의 조정. 다. 2)항 “ 발주기관 외에 당해공사와 관련된 인허가기관등의 요구가 있어 이를 발주기관이 수용하는 경우 ”에 의거하여 유관기관 협의결과에 따른 추가공사비(보도 복구)관련하여 설계변경 승인 후 계약에 반영함이 타당할 것으로 판단됨.

6		조치계획

○ 상기 책임감리원의 검토의견과 같이 보도 등(재질변경) 복구계획에 따른 실정 보고가 적정하다고 판담됨으로 승인코자 하며,

○ 추후 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 1. 책임감리원 검토 의견서 1부.

2. 내역서등 관련문서 1식.   끝.