투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	3자단가계약 납기변경_흙콘크리트(이촌한강공원 생태놀이터 조성사업)

1. 생태공원과-2602(2017.9.11.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여『이촌한강공원 생태놀이터 조성사업』에 소요되는 관급자재(흙콘크리트)에 대하여 아래와 같이 납품기한을 변경 하고자 합니다.

가. 건    명 : 흙콘크리트(이촌한강공원 생태놀이터 조성사업)

나. 공사기간 : 2017. 06. 12 ~ 2017. 09. 11

다. 변경내역

납 품 요구번호	품 명	규 격	수 량	납품기한		비 고
				당 초	변 경
12-17-1- 41726-00	흙콘크리트	t150mm	410㎡	2017.09.11	2017.10.31	한솔이앤씨

라. 연기사유 : 한국건설생활환경시험연구원 납품검사 미완료.  끝.

주무관	김윤미		총무과장	09/12 代임종배
협조자
시행	총무과-15435	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 총무부 총무과	/
전화	02-3780-0719	/전송	02-3780-0740	/	hjymhg@seoul.go.kr	/	대시민공개