투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	「시립중랑노인전문요양원 증축공사 」계약변경(공기연장) 의뢰

우리 본부에서 시행중인 「시립중랑노인전문요양원 증축공사」와 관련하여 공기연장에 따른 계약변경을 의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 시립중랑노인전문요양원 증축공사

나. 계 약 자 : 용성종합건설(주) 외 1개사

다. 계약변경 요청내용

구 분		변경 전	변경 후	증 감
**	****	***********************	***********************	******
	****	*************	*************	****
**	****	***********************	***********************	******
	****	*************	*************	****

라. 변경사유 : 공사초기 민원으로 철거공사 지연 및 토공사중 예상치 못한 매립폐기물 등 발생으로 공사기간 연장

붙임  1. 공기연장 계약요청 검토보고 1부.

2. 설계변경(2차) 계약요청(공정표 포함) 및 합의각서 각1부.  끝.

	건축부장
★주무관	문성재		의료시설과장	이형재		건축부장	11/16 임인구
협조자
시행	건축부-16464	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어 플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2616	/전송	02-3708-2659	/	msj2061@seoul.go.kr	/	부분공개(5)