내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경(제3회) 시행 및 계약 의뢰(탄천1교 내진성능 보강공사)

1. 감리 18-1142호(2018.11.12.)와 관련입니다.

2. 우리 과에서 시행중인 “탄천1교 내진성능 보강공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경(제3회)을 시행하고자 변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 탄천1교 내진성능 보강공사

나. 공사기간 : 2017.12.18. ~ 2018.11.30.

다. 도 급 자 : ㈜다함테크

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비고(증·감액)
총공사비	1,340,698,000	1,104,470,000	(감) 236,228,000
도급액	1,340,698,000	1,104,470,000	(감) 236,228,000
관급자재	-	-	-
이전비	-	-	-

마. 변경사유 : 세부 사유 별도 붙임

바. 예산과목 : 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물 내진보강공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 탄천1교 내진성능 보강공사 설계변경(3회) 검토보고 1부.

2. 설계변경 검토서 및 관련서류(건설사업관리단) 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	정동익		교량관리팀장	유제천		교량안전과장	11/16 김종호
협조자	계약총괄팀장	김민완
시행	교량안전과-20158	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1958	/전송	02-2133-1429	/	seestar7@seoul.go.kr	/	부분공개(5)