문서번호	급수운영과-20954
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
최용진		11/20 장종욱
협 조
	주무관		이문성
	주무관		김재영
	주무관		윤승구
	주무관		代노제현

설계변경 심의결과 보고

(2018년 북부수도사업소 관내 배수지 항 청소용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11. 20

북부수도사업소

급수운영과

설계변경 심의결과 보고

(2018년 북부수도사업소 관내 배수지 항 청소용역)

우리사업소에서 시행한 “2018년 북부수도사업소 관내 배수지 항 청소용역(단가계약)”에 대하여 용역시행결과 물량변동(보험료)에 따른 감액요인이 발생되어 설계변경 심의회의 개최 결과를 보고함.

1. 용역 개요

○ 용 역 명 : 2018년 북부수도사업소 관내 배수지 항청소 용역(단가계약)

○ 감액요인 : 노인장기요양보험료 미 가입 및 사급자재 물량 변동 감액

○ 계약기간 : 2018.04.18. ~ 2018.11.30

○ 도급비 변경 내역

- 당초 : ************

- 변경 : ***************************

○ 용역업체 : ***************

2. 심의회의 개최

○ 심의일정 : 2018.11.20.(화) 17:00

○ 심의장소 : 북부수도사업소 급수운영과

○ 위 원 장 : 급수운영과장

○ 심의위원 : 시설6급 이문성, 시설7급 김재영, 시설7급 윤승구, 시설7급 진하영

3. 심의 내용

○ 물량변동의 적정 여부

○ 계약 변동(증.감) 물량 계약단가 낙찰률적용 적정 여부

○ 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부

4. 심의 결과

○ 설계변경의 타당성 : 타당함

○ 제잡비 적용및 적정성 : 적정함

○ 계약변동(증, 감) 물량 계약단가 낙찰율 적정적용 여부 : 해당없음

○ 각종 제반 규정 준수여부 : 준수함

○ 관련규정의 불 명확한 내용에 대한 검토 : 적정함

5. 조치 의견

○ 위와 같이 설계변경 내역을 심의한 결과 설계변경이 타당하고 검토항목이        적정하여 본 심의결과에 의거 설계변경계약을 의뢰하고자 합니다.

첨부 : 1. 설계변경 검토 심의결정서  1부.

2. 설계변경 내역서  1부.

3. 설계변경 사유서  1부.   끝.