문서번호	토목부-19670
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김성권		여용석	11/20 김영수
협조

- 암사대교건설공사 -

사후환경영향조사용역 설계변경 (전체3회,12차1회) 검토 보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 암사대교건설공사 -

사후환경영향조사용역 설계변경 (전체3회,12차1회) 검토 보고

『암사대교 건설공사 사후환경영향조사용역』에 대한 환경영향조사 이행중 발생한 수량변경(감량)을 반영한 계약금액 조정에 대한 설계변경 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 계약 변경 요청 : [다산 2018-01810(‘18.11.20)호]

Ⅱ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 암사대교건설공사 사후환경영향조사용역

○ 규    모 : 환경영향조사 1식

○ 용역기간 : 2007.01.04.~ 2018.12.31.

○ 용 역 비 : 548,540천원(12차 37,180천원)

○ 용 역 사 : 다산컨설탄트 외1

Ⅲ		검 토 내 용

□ 전체(3회) 변경 검토

○ 공사시 조사기간 단축 반영 : 감)6,000천원

○ 운영시 조사가간 증가 반영 : 감)4,300천원

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
직접인건비	공사시	138,525,382	132,546,874	감)5,978,508
	운영시	11,014,336	12,749,954	증)1,735,618
직 접 경 비		225,361,200	219,487,400	감)5,873,800
용 역 기 간		2007.01.04. ~2018.12.31	2007.01.04. ~2018.12.31	변동없음

□ 12차(1회) 변경 검토

○ 조사기간 변경내역 반영 : 감)4,300천원

○ 조사기간 단축에 따른 직접경비 축소 반영 : 감)6,000천원

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
직접인건비	공사시	5,978,499	3	감)5,978,496
	운영시	1,735,618	3,471,237	증)1,735,619
직 접 경 비		16,095,800	10,222,000	감)5,873,800
용 역 기 간		게약일로부터. ~2018.12.31	계약일로부터. ~2018.12.31	변동없음

Ⅳ		조 치 계 획

○ 상기와 같이 직접인건비(공사시,운영시) 변경 및 이로 인한 직접경비 변경을 반영한 설계변경(전체3회,12차1회)은 타당한 것으로 사료되어 이른 시일내에 설계변경을 시행하여 향후 용역 시행에 차질이 없도록 조치코자 합니다.

붙임  1. 설게변경 요청서. 1부.

2. 설계변경 내역서 각1부.  끝.