내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(응봉유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계)

1. 물순환정책과-21020호(2018.11.20)와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진 중인 『응봉유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시 설계 용역』에

대한 계약변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 응봉유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 용역

나. 용역기간 : ‘18.4.23.~’19.1.20

다. 계약금액 : 금223,420,000원

라. 계 약 자 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소, ㈜이산

마. 변경내역 : 물량추가에 따른 계약금액 및 기간 변경

구 분	당 초	변 경	증․감
계약금액	223,420,000원	262,180,000원	증)38,760,000원
계약기간	‘18.4.26.∼’19.1.20	‘18.4.26.∼’19.5.20	증)120일

※ 세부내역 : 붙임 설계변경 내역서 참조

바. 변경사유 : 용역수행 중「지하안전영향평가」추가 발생으로 기간 및 금액 변경

사. 예산과목 : 물순환안전국, 물순환정책과, 깨끗한 물관리, 물환경 개선 및 관리,

응봉유수지 CSOs 저류조 설치, 시설비(설계비)

붙임 : 1. 용역 계약변경 검토 보고서(방침) 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 준공기간 연기의뢰서 1부.

5. 실정보고서 1부.  끝.

	물순환정책과장
★실무사무관	정희중		오염총량팀장	정병권		물순환정책과장	11/20 한유석
협조자	계약1팀장	조현
시행	물순환정책과-21100	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 덕수궁길 15, 서울시청 서소문청사 1동 8층 물순환안전국 물순환정책과	/
전화	02-2133-3771	/전송	02-2133-1040	/	imjhj60@seoul.go.kr	/	부분공개(5)