문서번호	토목부-19628
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	교량건설과장	토목부장
권해엽	장종환	11/20 김영수
협 조
	주무관		김동현

설계변경(전체2회) 검토 보고

- 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설폐기물 처리용역-

2018. 11.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

설계변경(전체2회) 검토 보고

- 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설폐기물 처리용역 -

월계역사 연장구간 중 교각6번 가시설 설치 및 터파기 작업 시행 중 매립폐기물이 발생하여 폐기물 처리용역 설계변경 검토 보고임.

※ 관련근거 : 대콘(초안산) 제18-234호(2018.10.19.)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역규모 : 폐기물 운반 및 처리 474톤

○ 도 급 비 : 14,531천원

○ 용역기간 : ′16.9.30. ~ ′18.11.30.

○ 용 역 사 : ㈜방태

□ 설계변경 및 주요내용

○ 전체분(2회)                                          (금액 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 . 감	비고
전 체 (2회)	도 급 액	14,531	16,786	증) 2,255
	용역기간	2016.09.30. ~ 2018.11.30.	2016.09.30. ~ 2019.03.31.	증) 121일

○ 설계변경 및 공기연장 사유

- 월계역사 연장구간 중 교각6번 가시설 설치 및 터파기 작업 중 매립폐기물이 발생하여 설계변경 사유 발생

- 철도보호지구 행위신고 절차 지연 및 협의 결과에 따른 공사 지연

- 노원구청 및 인근주민 민원사항에 따른 공사 지연

○ 주요 설계변경 내용

구 분	발생구간 (위치)	폐기물 종류	폐기물 수량 (ton)			비고
			당초	변경	증·감
매립폐기물 폐기물 발생	교각 6번	폐콘크리트	474	557	증) 83

※ 관련 근거 : 대콘(초안산) 제18-234호(2018.10.19.), 토목부-18058호(2018.10.24.)

○ 공사비 변경 현황(전체 2회)

(금액 : 원)

공 종		수량		금 액 (전체분)		증.감	비 고
		당초	변경	당 초	변 경
폐기물 운반	- 폐콘크리트(ton)	***	***	*********	*********	***********	** ****** **
	- 일반관리비(%)	**	**	*******	*******	***********
	- 이 윤(%)	**	**	*******	*******	***********
폐기물 처리	- 폐콘크리트(ton)	***	***	*********	*********	************
용 역 비	공급가액			**********	**********	************
	부가가치세			*********	*********	***********
	도급금액			**********	**********	************
용 역 기 간(전체)				*********** *********30.	********** ***********.	**********

□ 조치의견

○ 중랑천 초안산 앞 보행교량 월계역사 연장공사 중 발생한 매립폐기물에 대하여 감리단 검토 의견이 타당하여 계약금액 및 공사기간을 변경 조정하고자 함.

붙임 : 1. 감리단 검토 의견서 각 1부.

2. 설계변경 내역(전체 2회) 각 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.