투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재(레미콘) 구매 계약변경 요청(서초역~방배로간 도로개설공사)

1. 방재시설부-9578(2018.7.23.)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 구매요청한「서초역 ~ 방배로간 도로개설공사」의 관급자재(레미콘)에 대하여 계약 변경 및 신규 구매를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 기존계약 변경 내용(물량 정산)

납품요구번호	품명	규격	단위	수 량			비고
				당초	변경	증감
12—18-1-59728-00	레미콘	25-27-150	㎥	2,211	828	△1,383	정선

나. 신규계약 내용

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
레미콘	25-27-150	㎥	1,383	천마

다. 변경사유 : 회사사정에 따른 레미콘납품이 불가하여 배정변경 요청

라. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충, 서초역~방배로간 도로확장, 시설비

붙임 : 1. 조달물품매입요구서(당초/변경/추가) 각 1부.

2. 건설사업관리기술단 공문 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	한승균		치수시설과장	조성만		방재시설부장	11/20 이임섭
협조자	경리과장	이현숙
시행	방재시설부-14743	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 (무교동)	/
전화	3708-8772	/전송	3708-8756	/	lovenear@seoul.go.kr	/	부분공개(5)