문서번호	도시철도토목부-13646
결재일자	2018.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
임경태		방영복	11/21 정대현
협 조
	주무관			안태현

「서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사」

공사용 조명 실정보고(기간연장)에 대한 검토 보고

2018. 11.

도시기반시설본부

도시철도토목부

「서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사」

공사용 조명 실정보고(기간연장)에 대한 검토 보고

『서울 지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사』와 관련 공사기간 연장에 따른 공사용 조명비용 반영 요청에 실정 보고가 있어 이에 대해 검토 보고 드림. ※ 지감922-18-499(‘18. 11.19.)

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사

❍ 위    치 : 올림픽공원역~강동구 둔촌동 산29번지 일원

❍ 규    모 : 총연장 1,470m【본선 1,370m, 정거장 1개소, 환기구 4개소】

❍ 공사기간 : 2010.09.16 ~ 2018.12.31

❍ 도 급 비 : 141,719백만원

❍ 시 공 사 : ㈜대우건설 외 4개사

❍ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소 외 2개사

2		보고내용

□ 관련근거

○ ‘15.12.28. : 지하철 9호선 3단계 건설서업 공사기간 조정 검토보고(도시철도토목부-16559호)

○ ‘16.11.18. : 지하철 9호선 3단계 기본계획 변경승인 알림

- 국토교통부로부터 기본계획 사업기간 변경(당초2015년→변경2018년)

□ 검토내용

○ 공사용 조명 및 보안등 설치기간 현황

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
공사기간	‘10.9.16~’16.3.17 (66개월)	‘10.9.16~’17.12.31 (87개월)	증 21개월

○ 관련 법령 검토

□ 입찰안내서

제3장 계약조건 (지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건)

제20조(설계변경 등) ① 다만, 제2항의 사유에 의한 경우는 계약금액을 조정할 수 있다.

② 계약금액의 조정이 가능한 설계변경은 발주기관에 책임 있는 사유 또는

천재․지변 등 불가항력의 사유로 인한 경우

9. 발주기관의 책임 있는 사유로 계약기간이 연장된 경우

□ 공사비 검토                                       【단위 : 백만원】

구 분	변 경 내 용
	당 초	변 경(안)	증 감
직 접 비	142	399	257
간 접 비	68	180	112
물가변동	39	108	69
공사비계	249	687	438

3		책임감리원 검토의견

○ 입찰안내서 제3장 계약조건(지하철9호선 3단계 일괄공사계약특수조건) 20조(설계변경 등 9. 발주기관의 책임 있는 사유로 계약기간이 연장된 경우) 의거하여 공사기간 연장에 따른 직접공사비 추가비용 청구 목록에서 공사용조명 및 보안등 금액을 반영함이 타당할 것으로 판단되며, 추후 설계변경 및 계약금액 변경함이 타당할것으로 판단됨.

○ 사업계획 변경 등 발주 기관의 필요에 의한 경우에 의거 설계변경 및 계약금액 변경함이 타당함.

4		조치계획

○ 공사기간 연장에 따른 공사용 조명에 대해 실정보고 한 사항으로서 연장된 계약기간 동안 설치되었던 사항인바,

○ 추후 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 1. 책임감리원 검토 의견서 1부.

2. 내역서등 관련문서 1식.   끝.