투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(신상도 지하차도 확장공사)

우리 본부 시행 건설공사인「신상도 지하차도 확장공사」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 신상도 지하차도 확장공사

2. 도 급 비 : 11,964백만원

3. 공사기간 : 총괄 '07.12.31.~'18.12.31.

4. 도 급 사 : (유)한백종합건설 외 1개사 (대표 : 이진일)

5. 준공기한 연기내역 (※ 계약금액 변경 없음)

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	'07.12.31.~'18.12.31.	'07.12.31.~'20.12.31.	증)731일

6. 귀책소재 : 도급사에 있지 않음

7. 지체상금 : 미부과

8. 연기사유 : 지장가옥에 대한 보상 절차 이행 및 주민 이주 독려에 장기간 소요

붙임 : 1. 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	방재시설부장
주무관	이시연		방재시설과장	진재섭		방재시설부장	11/21 이임섭
협조자
시행	방재시설부-14805	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-2133-8441	/전송	02-2133-0740	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	대시민공개