＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 체결 (개봉지하차도 ~ 광복교 외 1개소 송배수관 정비공사)

급수운영과-28791호(2018.11.19.)의 변경계약 의뢰와 관련하여, 아래와 같이 변경계약 체결하고자 합니다.

1. 계약명: 개봉지하차도 ~ 광복교 외 1개소 송배수관 정비공사

2.******* ***********

3. 계약일자: 2018. 4. 30.

4. 공사기간: 당초 2018. 5. 8. ~ 2018. 11. 25.
변경 2018. 5. 8. ~ 2018. 12. 31.

5. 준공기한 연기사유: *******************************

6. 계약금액

(단위: 원)

구 분	변경전	변경후	증감액	비고
계약금액	***********	***********	*

붙임 1. 변경계약 의뢰 1부.
2. 준공기한 연기 검토보고서 1부.  끝.

주무관	김범진		행정관리팀장	송성하		행정지원과장	김창년		강서수도사업소장	11/21 최생인
협조자
시행	행정지원과-24724	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3843	/전송	02-3146-3879	/	bjk912@seoul.go.kr	/	부분공개(5)