투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	「2018한강드론공원 정비공사」설계변경 시행 및 계약의뢰

우리 본부에서 시행중인 「2018 한강드론공원 정비공사」 와 관련하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2018 한강드론공원 정비공사

나. 위    치 : 광나루한강공원 등

다. 공사기간 : 2018.10.29. ~ 2018.11.27

라. 도 급 자 : 태림조경(주) 대표 정명선

마. 설계변경 사유 : 현장여건 변화에 따른 물량 변경 등

바. 계약금액                                                (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총공사비		49,050,000	48,829,000	감221,000
도급비	공급가액	44,590,909	44,390,000	감200,909
	부가가치세	4,459,091	4,439,000	감20,091
	계	49,050,000	48,829,000	감221,000

사. 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 관리시설 관리 및 개선, 한강공원 이용시설 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율표 검증확인서 1부.  끝.

	공원부장
주무관	박종민		공원사업과장	송경수		공원부장	11/21 김인숙
협조자	주무관	안희정		총무과장	박병현
시행	공원사업과-2264	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	(02)3780-0873	/전송	(02)3780-0745	/	baram029@seoul.go.kr	/	부분공개(5)