문서번호	조경과-6561
결재일자	2018.11.22.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

	시 민
주무관	조경과장
최수영	11/22 代강금완

「2018년 서울대공원 야구장 사면 정비공사」

설계변경 검토 보고

2018. 11.

서울대공원

(조 경 과)

「2018년 서울대공원 야구장 사면 정비공사」

설계변경 검토 보고

우리 공원에서 추진중인 ‘2018년 서울대공원 야구장 사면 정비공사’ 관련 현장여건 반영 등에 따른 설계변경사항이 발생하여 아래와 같이 검토 보고드림

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 2018년 서울대공원 야구장 사면 정비공사

위    치 : 과천시 막계동 398번지 서울대공원 야구장

공사내용 : 축대목 설치 57경간, 수목식재 600주, 우배수로 정비 40m

공사기간 : 2018. 11. 6 ~ 11. 30

도 급 액 : *********

도급업체 : *********

공종	설계변경내용	비고
축대목 설치	○ 야구장사면 토사유실 방지를 위해 축대목을 현장여건에 맞는 높이로 시공(당초 5단,3단,2단→변경 6단,5단,4단,3단,2단) · 축대목A 설치(H500×L1500) 17.2경간 → 0경간 · 축대목B 설치(H300×L1500) 17.2경간 → 0경간 · 축대목C 설치(H200×L1500) 17.2경간 → 0경간 · 축대목A-1 설치(L=38.2M, 6·5·4·3·2단, 26경간) 0식 → 1식 · 축대목B-1 설치(L=15.0M, 6·5·4단, 10경간) 0식 → 1식	현장여건 반영
수목식재	○ 기존 휀스 기초콘크리트 노출지역 차폐를 위한 수목식재 필요 · 황매화(H1.0×W0.6) 600주 → 790주(190주 추가)	현장여건 반영
제경비 정산	○ 환경보전비 등 사후정산금액 반영 · 환경보전비 43,159원 → 0원 · 건설기계대여대금지급보증서 18,702원 → 0원	제경비 정산 반영

Ⅱ		설계변경내용 검토

Ⅲ		설계변경금액

(단위 : 원)

구 분		금 액		증 감	비 고
		당 초	변 경
*******		**********	**********	*	****
* ** *	*******	**********	**************	*
	*****	*********	*********	*
	*	**********	**********	*

Ⅳ		검토의견

위 설계변경 내용은 현장여건 반영 및 제경비 정산에 따른 설계변경 사항으로 별첨 설계변경내역서와 같이 변경시행 조치코자 함

붙임 : 1) 설계변경내역서 1부.

2) 계약금액조정 검증확인서 1부. 끝.