투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지하철9호선 3단계 918공구 건설공사 전면책임감리원 귀하
(경유)
제목	918공구 실정보고 승인 알림

1. 서영감리제-435호(2018.11.1.), 436호(2018.11.01.), 437호(2018.11.1.), 442호(2018.11.1.) 및 678호(2018.11.12.) 와 관련입니다.

2.『서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사』와 관련, 「계측비용(공기연장)  추가 실정보고」,「공사 중 전력비(공기연장) 실정보고」,「물푸기(공기연장) 실정보고」,「현장사무실 비용(공기연장) 실정보고」,「교통신호기 복구 실정보고」에 대하여 감리원 의견과 같이 승인하니, 추가 공사비 반영은 설계변경자문회의를 거쳐 설계변경시 반영함을 알려드립니다.

붙임 : 1. 계측비용(공기연장) 추가 검토보고 1부.

2. 공사중 전력비 추가(공기연장) 실정보고 검토보고 1부.

3. 교통신호기 복구 실정보고 검토보고 1부.

4. 물푸기(공기연장) 추가 실정보고 검토보고 1부.

5. 현장사무실(공기연장) 비용 실정보고 검토보고 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김성옥		주무관	유원하		토목2과장	11/22 방영복
협조자
시행	도시철도토목부-13690	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02)772-7306	/	kso0514@seoul.go.kr	/	부분공개(5)