문서번호	도시철도토목부-13700
결재일자	2018.11.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
김성옥		방영복	11/22 정대현
협조
	주무관		유원하

『지하철9호선 3단계 918공구 건설공사』

계측 추가시행 실정보고에 대한 검토보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사」

계측 추가시행 실정보고에 대한 검토보고

「서울지하철9호선 3단계 918공구 건설공사」와 관련 계측 추가시행에 따른 책임감리원 실정보고에 대한 검토 보고임.

※ 서영감리제2018-437호(‘18.11.21.) 추가계측 시행에 따른 실정보고

Ⅰ		사업개요

❍ 공 사 명: 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사

❍ 위    치: 서울시 송파구 잠실동 아시아 선수촌~삼전동 잠실병원

❍ 규    모: 총연장 1,290.7m(정거장 1개소, 본선환기구 3개소)

❍ 공사기간: 2010.02.19. ~ 2018.12.31.

❍ 도 급 비: 143,297백만원

❍ 시 공 사: SK건설 외 4개사

❍ 감 리 사: (주)서영엔지니어링 외 3개사

Ⅱ		추진경위

❍ ‘10.02.19 : 공사 착공

❍ ‘13.04.18 : 산학협동연구 김치환교수 사유지하부 통과구간 추가 계측 의견 제시[본부 기동점검 지적사항]

❍ ‘13.09.11 : 코엔에너지 도시가스 300mm 메달기 구간 추가 계측

❍ ‘14.02.23 : 수자원공사 광역상수관 2,200mm 메달기 구간 추가계측 요청

❍ ‘15.03.30 : 정기(기동불시) 점검 조치[사면, 흙막이 붕괴 재해예방]

❍ ‘18.11.21 : 추가계측 시행에 따른 실정보고(감리단→본부)

Ⅲ		보고내용

□  추가 계측 설치 사유

❍ 도시가스(코엔에너지),상수관로(수자원공사)현장점검 시 이설 매달기된 도시가스 및 상수관로에 침하계 및 변형률계 설치 요청

❍ 과다 지하수 유출로 인한 주변 지하수위계 및 지중 변위계 추가 설치

❍ 발주처(기술심사과) 기동불시점검 시 본선1터널 사유지하부통과구간 및 본선2터널구간에 대한 계측 재검토 지시

❍ 구간별 계측기 추가

구 분	구 간	추가설치 사유	비고
S/T 응력계	본선개착3구간	지하수과다 유출구간
S/T 축력계	정거장,본선개착3구간	지하수과다 유출구간
E/A 축력계	본선개착3구간	가시설 변경(ST→E/A)
구조물 기울기계	정거장,본선개착2,3구간	현장 민원
균열 측정계	정거장.본선개착1,2,3구간	현장 민원
관로 변형률계	본선개착1.3구간	상수관 및 도시가스
관로 침하계	본선개착2,3구간	상수관 및 도시가스
박스변형률계	정거장.본선개착1구간	한전박스 및 횡단하수박스
천단침하계	1터널	사유지하부 통과구간
내공변위계	1터널	사유지하부 통과구간

❍ 계측기 설치 수량

공 종	규격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증‧감
개착구간	지중수평변위계 등	ea	536	641	106
터널구간	내공변위계 등	ea	437	624	87
계		ea	973	1,265	193

❍ 공사비 산출

(단위 : 백만원)

공 종	당초	변경	증·감	비고
직접공사비	602	711	증)109
제경비 외	273	339	증)66
총공사비	875	1,050	증)175

※ 수량 및 단가산출

- 수    량 : 지중수평변위계 등 193개 실제 추가 설치비 적용

- 적용단가 : 기 계약단가 적용

□ 책임감리원 검토의견

❍ 발주처 지시(기술심사담당관 기동불시점검 시) 및 지장물 유지관리기관(코엔에너지, 수자원공사)의 요청, 현장여건 변동에 따라 계측기를 추가 설치한 사항으로서,

❍ 증가된 공사비(175백만원)는 공사계약일반조건제21조(설계변경으로 인한 계약금액조정의 제한)7항, 지하철9호선3단계 일괄공사계약특수조건제19조(설계변경 등) ①항에 의거 추후 설계변경 시 계약금액내에서 조정함이 타당하다 사료됨.

Ⅳ		조치의견

❍ 상기 책임감리원의 검토의견과 같이 계측기 추가비용은 본부 설계변경자문소위원회 자문을 거쳐 계약금액 내에서 설계변경 조치코자 함.

※ 계측비용 추가 반영 : 증)175백만원

붙임  책임감리원 실정보고 1부.  끝.