“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	중소유통물류센터 지붕 누수 방수공사 계획(변경)

1. 소상공인지원과-14163(‘18.11.7.)호와 관련입니다.

2. 중소유통물류센터 지붕 누수 방수공사 관련 물량 증가로 다음과 같이 공사기간 등을 변경하여 추진하고자 합니다.

○ 변경내역

- 공사기간 (당초) 계약일 ~‘18.12.14. → (변경) 계약일로부터 6개월

***********************************************

○ 변경사유 : 공사 물량 증가

붙임 : 산출기초조사서 1부.  끝.

주무관	김서연		소상공인지원팀장	김진경		소상공인지원과장	11/22 이성은
협조자
시행	소상공인지원과-14964	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지 빌딩 7층 (무교동)	/
전화	02-2133-5554	/전송		/	ksy1030@seoul.go.kr	/	부분공개(7)