문서번호	소방행정과-15131
결재일자	2018.11.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
유영선	代조성현	안서용	11/22 김병로

『금천소방서 건립 사업』

철거 공사 및 폐기물처리 용역 추진계획

2018. 11.

구로소방서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

금천소방서 건립 사업
철거 공사 및 건설폐기물처리 용역 추진계획

『금천소방서 건립 사업』과 관련 사업부지 내 기존건축물 및 부지정리를 위한 철거공사 및 폐기물처리 용역 발주 계획을 수립하여 공사 발주에 만전을 기하고자 함

1		추진 개요

● 사업목적 : 도시계획시설(공공청사) 사업에 따른 사업부지 내 기존건축물 철거를 통하여 금천소방서 건립 사업에 기여함.

● 시설현황

- 대지면적 : 금천구 독산동 1054-8번지 등 15필지

- 대지면적 : 3,492㎡

- 공사규모 : 주택 7개동, 상가 3개동, 도로, 연면적 4,942.96㎡

	연번	지번	층수	연면적
	1	독산동 1053-8	지하1층/지상3층	1,860.02㎡
	2	독산동 1053-13	지하1층/지상2층	196.56㎡
	3	독산동 1053-15	지하1층/지상2층	176.31㎡
	4	독산동 1053-16	지하1층/지상2층	249.21㎡
	5	독산동 1053-18	지하1층/지상2층	101.42㎡
	6	독산동 1053-19	지하1층/지상2층	161.4㎡
	7	독산동 1053-20	지하1층/지상2층	148.32㎡
	8	독산동 1053-21	지하1층/지상2층	183.36㎡
	9	독산동 1053-22	지하1층/지상3층	1324.6㎡
	10	독산동 1053-23	지하1층/지상3층	464㎡
	11	독산동 1053-17,30, 32,33,34	도로	77.7㎡

● 사업예산 : 926,657,552원[소방재난본부 / 금천소방서 신설 /시설비(214-401-01)]

● 사업범위 : 금천소방서 건립 사업 철거공사 , 건설폐기물처리용역

★ [실시설계 연장요청 건(UIA-18-004, 2018.11.13.)과 관련, 실시설계 완료일이 변경될 경우 시공사 발주 등 일정이 연기됨에 따라 건축물 철거 범위 및 일정이 변경될 수 있음]

◆ 철거공사

- 전기, 수도 하수도 배관 폐쇄, 설비배관 및 위생기구 철거

- 바닥 및 벽체 구조물 철거, 지붕 트러스 철물철거, 철근콘크리트․철골재 철거

- 주변 포장재 철거

- 그 밖에 주변 정비에 필요하다고 판단되는 시설 철거

◆ 철거공사 감리 용역

◆ 건설폐기물 처리 용역

● 사업기간 : 2018.12. ~ 2018.3.

● 설계자 : UIA건축사사무소

2		추진 경위

● ’16.09.13. : 금천소방서 신설계획

● ’17.08.17. : 도기계획시설(공공청사)사업 실시계획 고시

● ’17.06.21. : 설계용역 계약 및 착수

● ’18.10.04. : 토지 등 취득일(토지수용개시일)

● ’19.01.31. : 실시설계 완료(예정)  (* 설계완료 변경예정일  : ’18.11.30 ⇒ ’19.01.31.)

3		발주계획

● 철거공사

◆ 공 사 명 : 금천소방서 건립 사업 철거공사

◆ 공 사 비 : 360,624천원

◆ 공사기간 : 착공일로부터 4개월

◆ 공사범위 : 주택 7개동,상가 3개동, 도로, 연면적 4,943㎡

◆ 공사금액

구 분	철 거 공 사	계
추 정 가 격	***********	***********
부 가 가 치 세	**********	**********
기 초 금 액	***********	***********

◆ 예산과목 : 소방재난본부, 금천소방서 신설, 시설비(214-401-01)

◆ 입찰방법 : 적격심사대상 / 총액입찰 / 제한경쟁(지역) / 긴급입찰

◆ 입찰참가자격

- 보유면혀 : 건설산업기본법 제8조 및 동범 시행령 제7조에 의한 비계․구조물 해체공사업

◆ 현장설명 : 미시행(지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제15조 제3항 단서규정에 의거 생략), 설계서 열람으로 갈음

◆ 낙찰자 결정방법

- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제48호, 2018.11.8.) 제2장 시설공사 적격심사 세부기준 <별지4>

● 건설폐기물처리 용역

◆ 용 역 명 : 금천소방서 건립 사업 철거공사 건설폐기물처리 용역

◆ 용 역 비 : 566,033,552원

구 분	폐기물처리 용역	계
추 정 가 격	***********	***********
부 가 가 치 세	**********	**********
기 초 금 액	***********	***********

◆ 용역규모 : 13,473.101톤(폐콘크리트등)

◆ 용역기간 : 착공일로부터 4개월

◆ 용역내용 및 관련근거

- 철거공사 중 발생하는 건설폐기물의 운반 및 처리

- 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 15조 및 시행령 제11조에 따른 100톤 이상의 건설폐기물은 건설공사와 분리하여 발주

◆ 입찰방법 : 적격심사대상 / 총액입찰 / 제한경쟁입찰(지역제한) /긴급 입찰

◆ 입찰참가자격

- 지역제한 : 입찰자는 입찰공고일 전일부터 입찰일까지, 낙찰자는 계약체결일               까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

- 보유면허 : 폐기물 관리법 제25조, 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제21             조 및 건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침(환경부예규 제              629호, 2018.01.16.)에 따른 건설폐기물 수집․운반업과 건설폐기물             중간처리업허가를 모두 득한 업체

◆ 계약방법

자격 보완을 위하여 건설폐기물 수집․운반업 허가만 득한 업체는 서울특별시, 경    기도, 인천지역의 중간처리업체와 공동도급(분담이행방식)이 가능하며, 이 경우    대표자는 서울특별시에 소재한 업체이어야 함.

◆ 예산과목 : 소방재난본부, 금천소방서 신설, 시설비(214-401-01)

4		행정사항 및 기타

● 공사발주 의뢰 (예정) : 구로소방서(소방행정과) ⇨ 재무과

● 향후일정

- 2018. 11. : 철거 공사 및 폐기물처리 용역 계약의뢰

- 2018. 12. : 입찰 및 낙찰자 선정, 적격심사

- 2018. 12. : 계약체결 및 착공(착수)

- 2019. 3. : 공사 및 용역 준공

붙임 1. 시방서(과업지시서) 2부.

2. 긴급공고 사유서 1부.

3. 철거공사 및 폐기물처리 용역 설계내역서, 철거설계도면 1부.  끝.