문서번호	교통운영과-19829
결재일자	2018.11.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교통개선팀장	교통운영과장
차양호		박상구	11/22 강진동
협조
	주무관		박평근

소통개선 설계 용역 준공기한 연기 검토 보고

2018.11.22

도시교통본부

교통운영과

소통개선 설계 용역 준공기한 연기 검토 보고

교통안전시설 심의 지연 등으로 과업 기간내 준공이 어려운 소통개선 설계 용역의 준공기한을 연기하여 용역 수행에 만전을 기하고자 함.

□ 용역 개요

○용역명: 2018년 도로교통소통개선 기본 및 실시설계 용역

○과업 내용: 기본 및 실시설계 35개소, 모니터링 5개소

○용역 기간: 2018.02.01. ~ 2018.11.30.

○계약자: *****************

○계약 금액: *************

□ 준공기한 연기 검토

○ 연기 검토 사유

- 설계 대상지 변경 및 교통안전시설 심의, 관련 부서 협의 지체 등으로 인해 설계가 지연되어 왔으며, 1개소는(남부순환로 까지고개 개선) 경찰청에 심의를 의뢰 중에 있어 준공기한 내에 준공이 어려운 실정임

○ 소요 기간 검토

- 경찰청의 교통안전시설 심의가 11월 29일로 예정되어 있어 이후 실시설계 내역   및 도면 작성, 준공도서 작성 등을 감안하여 최소 17일 정도 소요될 것으로   판단됨

○ 준공기한 연기

- 당초: 2018.11.30.

- 변경: 2018.12.17.

○ 지연배상금: 미부과

- 교통안전시설 심의 지연 등 우리 시에 귀책 사유 소재

․지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제14장 제7절-1-다. 끝.