내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 계약기간 연장 요청(수정)

1. 체육진흥과-10466(2018.11.20.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진하고 있는「난지물재생센터 야구장 조성 개발제한구역관리계획수립 및 도시관리계획(변경) 결정 용역」에 대하여 아래와 같이 용역 계약기간 연장 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역 개요

1) 용 역 명 : 난지물재생센터 야구장 조성 개발제한구역 관리계획수립 및 도시관리계획(변경) 결정 용역

2) 계약업체 : 주식회사 평화엔지니어링

3) 계약금액 : 금일억사천칠백오십사만오천원(￦147,545,000)

4) 계약기간 : 2015. 6. 4 ~ 2018. 12. 2

나. 변경 내용

1) 계약 기간

- 당   초 : 2015. 6. 4 ~ 2018. 12. 2

- 변   경 : 2015. 6. 4 ~ 2019. 12. 2

2) 변경 사유

- 개발제한구역 관리계획 수립 관련 사전협의 및 수정·보완 완료 후 국토교통부 중앙도시계획위원회 심의 예정이나, 계약기간 내 과업 완료가 불가하여 용역 계약기간 연장이 필요함.

3) 귀책사유 : 서울특별시

4) 지체상금 : 부과하지 않음

붙 임 : 1. 용역 계약기간 연장 방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	체육진흥과장
주무관	박상현		생활체육시설팀장	안신훈		체육진흥과장	11/22 한정우
협조자	계약1팀장	조현
시행	체육진흥과-10553	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개