문서번호	시설개선과-9816
결재일자	2018.11.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
임신택		정경수	11/22 박영준
협 조
	운영기획과장			김남대
	주무관			이경수
	주무관			이호경

- 효창운동장 내외부 정비공사 -

물량변경에 따른 계약금액 조정 검토보고(1회)

2018. 11.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 효창운동장 내외부 정비공사 -

물량변경에 따른 계약금액 조정 검토보고(1회)

『효창운동장 내외부 정비공사』와 관련하여 시공사 실정보고 사항에 대한 계약금액 조정 검토보고 사항임.

공사개요

○ 공 사 명 : 효창운동장 내외부 정비공사

○ 공사개요

- 수성페인트 9,194㎡, 오염방지코팅 1,106㎡, 우레탄페인트 335㎡ 등

- 구조체(균열·면 보수 및 단면복구) 보수 537㎡, 출입문 교체 등

○ 공 사 비 : ************

○ 공사기간 : 2018. 10. 08. ~ 11. 30.

○ 시 공 사 : *************

○ 추진경위

- 2018. 09. 04    발주방침 수립

- 2018. 09. 12    공사발주

- 2018. 10. 02    공사계약

- 2018. 10. 08    공사착공

보고내용

○ 본부석 관람석 정비 실시

- 본부 관람석 바닥 탑코팅(논슬립 포함) 및 철제난간 도장 실시

사유 : 본부 관람석 바닥의 노후 및 오염이 있어 이에 대한 정비 필요

․ 관람석 바닥 고압물세척(증 3,051.5㎡), 우레탄탑코팅(증 2,953.1㎡), 바닥논슬립(증 1,906.6㎡) 추가 반영 ****************

․ 본부석 철제 난간 도장(증 704㎡) 추가 반영 ***************

본부 관람석 정비 구간
		탑코팅(논슬립 포함) 구간
현황사진

○ 노후 출입문 추가 교체

- 강화도어 3개소 추가 교체 설치

사유 : 노후에 따른 작동불가 출입문 증가에 따른 반영

· 창호(강화도어) 수량(24개소→27개소) 반영 ***************

○ 기타 물량 정산

- 가설공사 중 이동식강관말비계, 가설울타리 미사용 ***************

- 구조체 보수공사 물량 정산 ***************

- 외벽타일 물량 정산 *************

- 본부석 우레탄탑코팅 실시에 따른 에폭시코팅 항목 제외 ***************

- 외벽타일 물량 정산에 따른 타일까내기, 콘크리트 치핑 항목 제외 *************

○ 제경비 항목중 일부 정산

- 노인장기요양보험료, 환경보전비, 건설하도급보증수수료 정산 ************

계약금액 조정

○ 총공사비 증․감 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비		***********	***********	***********
도급액	공 급 가 액	***********	***********	***********
	부가 가치세	**********	**********	***********

○ 예산조치

- 사업예산 : ************

- 계약금액 : ************

- 집행잔액 :  ***********

※증가되는 ***********은 본사업 집행잔액(***********)을 사용하여 계약금액 변경하고자 함

조치의견

○ 본부석 바닥 및 난간이 노후되어 우레탄 상부(탑코팅) 및 철제난간의 도장이 필요한 것으로 판단됨

○ 위와 같이 물량 변경을 실시하여 변경 계약을 시행코자 함.

붙임  1. 시공사 실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 수량산출서 1부.

4. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.