문서번호	기전과-10952
결재일자	2018.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
정영술		서수일	전결 11/23 이학구
협조

자전거도로 구축 교통안전표지 설치공사

(서소문로·청파로) 취소 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

서부도로사업소

(기전과)

자전거도로 구축 교통안전표지 설치공사(서소문로·청파로) 취소 보고

중구청에서 추진중인 청파로 일대 자전거도로 구축공사 사업이 취소되어,  이에 따른 자전거도로 구축 교통안전표지 설치공사(서소문로·청파로)를 취소

처리코자 함.

□ 관련 근거

○ 자전거정책과-12317(2017. 11. 6.) 및 관리단속과-16963(2017. 12. 15.): 계약 체결

○ 자전거정책과-11981(2018. 11. 21.): 사업취소 통보

□ 공사 개요

○ 공사명: 자전거도로 구축 교통안전표지 설치공사(서소문로·청파로)

○ 공사위치

- 서소문로(경찰청교차로~상수도사업본부교차로)

- 청파로(상수도사업본부교차로~서울역서부교차로)

○ 공사내용: 교통안전표지 설치공사 1식

○ 계약금액: 금8,062,170원

○ 공사기간: 2017. 12. 14.∼2018. 11. 30.

○ 계약업체: ㈜티엔지건설  대표 임준기

○ 예산과목: 교통사업특별회계, 자전거정책과, 자전거이용시설 확충 및

관리, 도심연결자전거도로망 구축, 시설비(401-01)

□ 공사취소 사유

○ 중구청에서 추진중인 청파로 일대 자전거도로 구축공사가 향후 청파로

문화거리 조성사업에 포함하여 시행하는 것으로 계획이 변경되어 사업

이 취소되어, 이에 따른 자전거도로 구축 교통안전표지 설치 공사 취소

□ 행정사항

○ 계약체결 해지 요청→ 관리단속과

붙임  관련공문 1부.  끝.