문서번호	도로관리과-17416
결재일자	2018.11.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장조사팀장	도로관리과장
함상민		백종은	11/23 박문희
협조
	주무관		김태우

『순환 아스팔트 혼합물 공용성능 개선을 위한 품질관리  기준개발』

설계변경 검토보고

2018. 11.

안전총괄본부

(도로관리과)

『순환 아스팔트 혼합물 공용성능 개선을 위한 품질관리  기준개발』

설계변경 검토보고

「순환 아스팔트 혼합물 공용성능 개선을 위한 품질관리기준 개발」기술용역(1차년도)에 대한 자문비 감액에 따른 설계변경(정산)을 검토하고 보고 드림

Ⅰ		용역개요

과 업 명: 순환 아스팔트 혼합물 공용성능 개선을 위한 품질관리기준 개발

과업기간: `18.06.25.~`18.11.22.

계 약 자: ㈜동성엔지니어링 김형철

(공동도급: 한국도로학회 윤경구)

계약금액: 금436백만원(부가세포함)

(1차:100백만원, 2차:250백만원, 3차:86백만원)

과업내용(1차년도)

국내외 순환 아스팔트 생산 관리 및 사용실적 현황조사 분석

서울시 적용사례 비교분석

폐아스팔트 콘크리트 반입시 관리현황 파악을 위한 현장 시료채취 및 분류

- 순환골재의 골재 특성, 노화아스팔트 특성, 순환 아스팔트 혼합물의 특성에 따른 품질 변동 영향인자 도출

노화아스팔트 바인더 수준별 물성 평가

Ⅱ		설계변경 보고

변경사유 : 전문가 자문비의 실 정산에 따른 감액

설계변경(정산) : 1차년도

- (당초) 총액 100,000천원 → (변경) 총액 99,500천원(감 500천원)

(단위 : 원)

구분	당초	변경	비고
공급가액	90,454,546	90,454,546	자문비 감액 500천원 → 0천원
부가가치세	9,045,455	9,045,455
자문비	500,000	0
도급액	100,000,000	99,500,000

설계변경(정산) : 1~3차년도

- (당초) 총액 436,000천원 → (변경) 총액 435,500천원(감 500천원)

(단위 : 원)

구분	당초	변경	비고
공급가액	395,000,000	395,000,000	자문비 감액 150천원 → 100천원
부가가치세	39,500,000	39,500,000
자문비	1,500,000	1,000,000
도급액	436,000,000	435,500,000

검토의견 : 자문비 미사용으로 인한 감액분을 상기와 같이 변경 계약하여 정산하고자 함

Ⅲ		추진 현황

‘18.11.15. : 용역 준공 보고

‘18.11.22. : 변경계약 의뢰(재무과)

’18.11.22. : 용역 준공

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.