＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(성북동1가 81~35-44호 외 4개소 배급수관 정비공사)

1. 우리사업소에서 서울특별시시설관리공단에 위탁 감독의뢰하여 시행중인『성북동1가 81~35-44호 외 4개소 배급수관 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 성북동1가 81~35-44호 외 4개소 배급수관 정비공사

나. 도 급 자 :***************

다. 공사기간 : 2018.04.09.~2018.11.30.

라. 설계변경내용 : 물량증감 및 신공종발생

마. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비(시설비),노후상수도관(배급수관)정비

(단위 : 원)

구분	계약금액(당초)	계약금액(변경)	증 감	비고
도급비	371,909,000	396,220,000	증) 24,311,000
공급가액	338,099,091	360,200,000	증) 22,109,909
부가세	33,809,909	36,020,000	증) 2,210,091

붙임 : 1. 설계변경 심의위원회 개최 결과보고 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율 검증 1부.  끝.

주무관	전진영		주무관	백청간		시설관리과장	허준행		중부수도사업소장	11/23 황일람
협조자	주무관	김영환		주무관	代이유찬
시행	시설관리과-33223	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2209	/전송	3146-2139	/	popu1211@seoul.go.kr	/	부분공개(5)