투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	서울지하철 9호선 3단계 1구간 송변전공사(총차,제2차) 설계변경 계약의뢰

1. 조달청 계약번호 16120406, 도시철도설비부-10771(’18.11.19.)호 관련입니다.

2. 서울지하철 9호선 3단계 1구간 송변전 공사(총차, 제2차) 설계변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철 9호선 연장건설 3단계 1구간 송변전공사

나. 계 약 자 : 거성일렉콤(주) 박성래 외 1개사

다. 계약기간 : ’15.08.11.~’18.11.30.(2차;‘16.11.25.~`18.11.30.)

라. 계약금액 : 총5,875,172,000원(2차:4.728,920,000원)

마. 설계변경금액

구 분		설 계 변 경 금 액			비 고
		당 초	변 경	증 감
총 차		5,875,172,000	5,736,715,000	감)138,457,000
도급비	1차	993,300,000 (1,000,000,000)	933,300,000	기 준공정산 (감16,700,000)	기준공
	2차	4,728,920,000	4,603,478,000	감)125,442,000
ESC		146,252,000	139,937,000	감6,315,000

마. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비 및 부대비, 시설비

붙  임  1. 설계변경보고서(방침서) 1부.

2. 설계변경 및 정산보고서(방침서) 1부.

3. 설계변경 합의서 1부.

4. 설계변경내역서 (별도송부) 1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	이재영		송변전과장	서태창		도시철도설비부장	11/23 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-11009	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7271	/전송	02-772-7308	/	lolee@seoul.go.kr	/	부분공개(5)