문서번호	건축부-16821
결재일자	2018.11.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
정호기		조영수	11/23 임인구
협조

마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사

건설사업관리용역 변경계약 검토보고(1차 및 총차)

2018. 11.

도시기반시설본부

건 축 부

마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사

건설사업관리용역 총차 및 1차수 변경계약 검토보고

「마곡산업단지 공공산업지원시설건립공사」건설사업관리용역의 1차 및 총차 변경계약에 대하여 검토보고 드림.

1		용역개요

용 역 명 : 마곡산업단지 공공산업지원시설건립공사 건설사업관리용역

용역기간 : 2017.09.01.~ 2021.02.22(총차)

2017.09.01.~ 2019.05.17.(1차)

용역금액 : 2,689,700,000원(총차), 889,000,000원(1차)

용역업체 : ㈜토문엔지니어링건축사사무소  외1

공사기간 : 2018.08.01.~ 2021.05.31

2		추 진 경 위

'17.09.01  : 건설사업관리용역1차 착수

'17.10.31  : 건설사업관리용역 1차 중단(실시설계용역 미실시)

'18.03.05  : 건설사업관리용역 1차 재개

'18.05.03  : 건설사업관리용역 총차 및 1차 기간변경 처리

'18.11.13  : 건설사업관리용역 총차 및 1차 기간 및 금액변경요청

3		관련근거

토문 제2018-850(2018.11.13)호에 의거 총차 및 1차 계약변경 요청

- 계약기간 및 금액변경사유

·  용역계약(30개월) 이후 공사계약(34개월)에 맞춰 용역기간 조정

·  2018년도 물가변동에 따른 용역금액 증가 111,898,000원 반영

- 계약변경내용

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	비 고
용역 기간	총차	‘17.09.01.~’21.02.22	‘17.09.01.~’21.06.30	128일(증)
	1차	‘17.09.01.~’19.05.17	‘17.09.01.~’19.05.17	103일(증)
용역 금액	총차	2,689,700,000	2,900,245,000	210,545,000(증)
	1차	889,000,000	1,099,545,000	210,545,000(증)

- 증액금액 구성

(단위:원)

구 분	금 액	비 고
증액금액구성 1	111,898,000	18년도 물가연동 분
증액금액구성 2	2,689,700,000	128일 증가분
합 계	210,545,000	증

4		처리의견

공사계약기간 반영 및 2018년도 물가변동에 따른 계약변경 요청이 적정하므로 변경계약 처리하고자 함.

건설사업관리용역 총차 및 1차 계약변경을 우리 본부 계약부서(총무부)에 의뢰 함.

붙 임 : 1. 건설사업관리자 계약변경요청 공문 1부.

2. 건설사업관리용역 배치계획 및 내역서(1차 : 당초, 변경) 1부.

3. 건설사업관리용역 배치계획 및 내역서(총차 : 당초, 변경) 1부.

4. 2018년도 물가변동에 따른 계약금액 조정 보고서 1부.  끝.