＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	뚝도아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰

1. 우리 뚝도아리수정수센터 『자양취수장 조류차단막, 오일휀스 철거 설치 및 이물질 제거     공사』시행 중 설계변경 사유가 발생되어 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여     주시기 바랍니다.

가. 건     명 : 자양취수장 조류차단막, 오일휀스 철거 설치 및 이물질 제거공사

나. 계 약 자 : ********************

다. 공사기간 : 2018. 06. 01. ~ 2018. 11. 27.

구 분	당초계약금액	설계변경금액	증․감	비고
도급비	43,927,000	37,754,000	감 6,173,000

라. 설계변경 내용                                    (단위:원)

마. 설계변경 사유

- 시공물량 증·감에 따른 설계변경

- 제경비 납부 정산에 따른 설계변경

- 연금,건강, 노인장기요양보험료 정산

바. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비,수선유지비

붙임 :  1. 설계변경 보고서   1부.

2. 설계변경 시행   1부.

3. 설계변경 내역서   1부.

4. 합의서   1부.  끝.

	정수과장
주무관	박준호		정수과장	11/23 김효상
협조자	주무관	양은영
시행	정수과-7192	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로27 뚝도아리수정수센터 정수과	/
전화	3146-5555	/전송		/		/	부분공개(5)