“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(도로교통소통개선 설계 용역)

1. 우리 교통운영과-19829(2018.11.22.)호와 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 연기 대상 사업 현황

용역명	2018년 도로교통소통개선 기본 및 실시설계용역
사업개요	기본 및 실시설계 35개소, 모니터링 5개소
계약일	2018.02.01.
착공일	2018.02.01.
당초 준공기한	2018.11.30.
변경 준공기한	2018.12.17
***	*****************
****	*************
연기사유	설계대상지 변경 및 교통안전시설 심의 지연 등으로 준공기한 연기
귀책소재	서울특별시
지체상금	미부과

붙 임 1. 용역 변경 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 변경 의뢰서 1부. 끝.

	교통운영과장
주무관	차양호		교통개선팀장	박상구		교통운영과장	11/23 代김옥희
협조자
시행	교통운영과-19885	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	2133-2467	/전송		/		/	부분공개(5)